2013년도 품질관리 현장 확인 점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

❍ 점검기간 : 2013. 3. ~ 12월

❍ 점검대상 : 지하철9호선 915공구 건설공사 등 총 204개 현장

- 시와 투자기관 등에서 발주하였거나, 인가 · 허가 · 승인한 건설공사

- 품질시험계획 수립 대상공사의 발주자가 기동반 점검을 의뢰한 건설공사

❍ 주요 점검사항

- 굳지 않은 콘크리트에 관한 공기량, 슬럼프, 염화물함유량 등 시험

- 철근, 보도블록, 벽돌 등 사용자재의 적정 여부

- 품질시험, 검사 이행여부 등

Ⅱ		점 검 결 과

❍ 지적사항 : 시험·검사 실적 보고서 보완 등 183건

- 2013년도 품질관리 현장 확인 기동반 점검 및 조치결과

(단위 : 건)

구 분		점검실적 (개소)	지적건수	조치건수	비 고
계		204	183	183
관공사	소계	62	50	50
	도시기반시설본부	56	39	39
	상수도사업본부	6	11	11
투자기관	소계	51	50	50
	SH공사	36	30	30
	서울메트로	12	12	12
	도시철도공사	1	3	3
	농수산식품공사	2	5	5
민간공사	소계	77	80	80
	서울시	-	-	-
	지치구	77	80	80
기타공사	소계	14	3	3
	도로사업소 및 시설관리공단	14	3	3

- 유형별 지적현황

(단위 : 건)

계	각종계획서 수립 미흡	품질관리자 선임 부적정	시험장비 미확보 및 교정 미실시	시험실 미확보 및 부적정	각종 대장 미확보 및 작성 부적정	레미콘부적합	골재저장설비 규격 미설치 및 배수불량
183	43	37	5	16	70	9	3

❍ 점검결과 주요 지적사항

- 레미콘 슬럼프 및 공기량 기준치 초과 혹은 미달

- 건설현장 사용건설자재(철근, 벽돌, 콘크리트블록 등)의 품질 부적합

- 품질시험계획서 수립 시 일부 자재 누락, 사용자재의 규격별 미 구분, 대상   물량 및 시험빈도 및 횟수 임의적용 등 품질시험계획서 수립 미흡

- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당  업무 및 전문분야를 등재하여야 하나 미등재

- 품질시험검사대장 작성 시 시험 · 검사 미 구분 및 시험치 · 기준치 누락

- 현장시험실, 시험장비 미확보 및 시험장비 검 · 교정 미실시

- 레미콘 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여  주기적인 균열점검 등 균열관리를 하여야 하나 균열관리계획서 미수립

- 주요 자재 검사 및 수불부 미 작성

- 콘크리트의 압축강도 시험을 위해 설치한 시험실내 수조의 온도관리 미흡 등

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 품질관리 현장 확인 기동반 “불시 검사제” 활동 지속시행(2013년도부터 시행)

- 시 및 산하기관에서 시행하는 건설현장에 사용되는 모든 자재의 품질확보를위하여 “불시 검사제” 지속 시행

❍ 품질관리 책자(알기 쉬운 건설공사 품질관리) 발간 배포

- 건설현장 품질관리 시 알아야 할 관련법규, 자재 시험대상 및 방법, 공사 점검절차 및 방법, 기타 현장 점검 시 주요 지적사례 등을 발주자, 시공자, 감리자에게 건설공사 시 참고할 수 있도록 제공하여 건설공사 품질확보

❍ 건설공사 품질관리 기술자 교육 강화

- 건설공사 품질관리 기술자에게 건설공사 품질시험계획 수립 및 주요 건설자재의 품질관리 요령 등에 관한 교육을 실시하여 건설공사 품질수준 향상 및 업무능력 제고

※ 교육대상 : 서울시 및 자치구 건설관련 공무원, 서울시 투자기관 및 공단직원, 시공사 및 감리단 직원