2013년도 품질시험계획 이행확인 점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

❍ 점검기간 : 2013. 3. ~ 12월

❍ 점검대상 : 강북시립미술관 건립공사 등 총 145개 현장

- 시와 투자기관 등에서 발주한 30억원 이상 500억원 미만인 건설공사

- 품질시험계획 수립 대상공사의 발주자가 이행확인을 의뢰한 건설공사

❍ 주요 점검사항

- 품질시험․검사에 필요한 관련 자료의 구비․활용 여부

- 품질시험계획 내용의 적정성 여부(주요 자재 및 공정 포함 여부)

- 품질관리 관련 법령․규정․품질시험계획에 필요한 품질관리자, 시설 및 장비 등의 적정 확보 여부 등

- 품질시험계획에 의한 품질시험․검사의 적기․적정빈도 실시여부 등

Ⅱ		점 검 결 과

❍ 지적사항 : 시험·검사 실적 보고서 보완 등 282건

- 2013년도 품질시험계획 이행확인 점검 및 조치결과

(단위 : 건)

구 분		점검실적 (개소)	지적건수	조치건수	비 고
계		145	282	282
관공사	소계	58	107	107
	도시기반시설본부	23	44	44
	상수도사업본부	3	3	3
	한강사업본부	5	7	7
	교육지원청	1	2	2
	자치구	26	51	51
투자기관	소계	24	40	40
	SH공사	9	14	14
	서울메트로	13	21	21
	도시철도공사	1	2	2
	농수산식품공사	1	3	3
민간공사	소계	63	135	135
	서울시	-	-	-
	자치구	63	135	135

- 유형별 지적현황

(단위 : 건)

계	각종 계획서 수립 미흡	품질관리자 선임 부적정	시험장비 미확보 및 교정 미실시	KS규격집 미확보	각종 대장 미확보 및 작성 부적정	기 타
282	82	27	2	17	154	-

❍ 점검결과 주요 지적사항

- 품질시험계획의 철근, 레미콘, 흄관 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정 하여야 하나 세부화 되어 있지 않은 등 품질시험계획서 수립 미흡

- 레미콘 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하여   주기적인 균열점검 등 균열관리를 하여야 하나 균열관리계획서 미수립

- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당업무 및 전문분야를 품질관리자 및 품질시험으로 등재하여야 하나 미등재

- 시험기기는 교정주기에 맞게 교정을 받아 사용하여야 하나 미교정 되어 있으며 시험실 이전으로 압축강도 시험기기의 위치가 변경될 시에는 재교정을 실시 후 사용하여야 하나 재 교정 없이 사용

- 주요 자재(레미콘, 각종 벽돌 등)에 대한 현장시험시에는 시험실에 한국산업규격 (KS규격)집을 비치 확인하여 관련규정을 준수하고 적용하여야 하나 KS규격집 미확보

- 콘크리트의 압축강도 시험을 위해 설치한 시험실내 수조의 온도관리 미흡 등

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 품질관리 책자(알기 쉬운 건설공사 품질관리) 발간 배포

- 건설현장 품질관리 시 알아야 할 관련법규, 자재 시험대상 및 방법, 공사 점검절차 및 방법, 기타 현장 점검 시 주요 지적사례 등을 발주자, 시공자, 감리자에게 건설공사 시 참고할 수 있도록 제공하여 건설공사 품질확보

❍ 건설공사 품질관리 기술자 교육 강화

- 건설공사 품질관리 기술자에게 건설공사 품질시험계획 수립 및 주요 건설자재의 품질관리 요령 등에 관한 교육을 실시하여 건설공사 품질수준 향상 및 업무능력 제고

※ 교육대상 : 서울시 및 자치구 건설관련 공무원, 서울시 투자기관 및 공단직원, 시공사 및 감리단 직원