사업명 : 풍납취수장 취수모터펌프 1호 교체

기관명 :영등포아리수정수센터

□ 사업목적

◦ 장기간 사용으로 노후화되고, 효율이 저하된 모터펌프를 교체하여 모터펌프의 효율을 향상시키고 안정적인 원수공급체계를 확보하기 위함.

※ 2013년 에너지진단 및 기술진단 결과 내용 반영

□ 사업개요

◦ 위    치 : 풍납취수장

◦ 규    모 : 모터펌프 600kw(800hp) 1대 교체

◦ 사업내용 : 모터펌프 600kw(800hp) 1대 교체 및 부대공사

◦ 사업기간 : 2013. 9.12 ～ 2014. 1.10

◦ 총사업비 : 320백만원

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액	집 행 액			집행잔액 (불용액)	집행잔액 비 율	비 고 (낙찰차액)
		소계	지출액	이월액
기계장치/시설비	320	180	108	72	140	43.6%	108

□ 사업실적 및 향후대책

◦ 모터펌프 600kw(800hp) 1대 교체 및 부대공사

□ 불용(또는 이월) 사유

◦ 낙찰차액 : 108백만원   ◦ 예산절감 : 26백만원

◦ 집행잔액 : 6백만원

◦ 불용사유 : 철저한 원가계산을 통한 설계차액(26백만원), 낙찰차액

(108백만원) 및 집행잔액(6백만원) 발생

◦ 이월사유 : 기술진단 용량검토 결과 7월 통보로 사업발주 지연

작성자	소 속	직위	성 명
	보수과	담당	김익동
	☏ 3146- 5677	과장	김구식
	작성일자	2014. 2.

사업명 : 제1정수장 회수유량계 교체

기관명 :영등포아리수정수센터

□ 사업목적

◦ 내용연수(20년)가 경과된 1정수장 회수유량계를 교체하여 유량측정

정확도를 높이고 유량계 센서가 설치된 맨홀을 정비하여 시설물 유지

관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 서울시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터

◦ 규    모 : 초음파 유량계 Xonic-100 1대설치 및 전기공사 1식

◦ 사업내용 : 오래된 초음파유량계 교체로 정확한 유량측정

◦ 사업기간 : 2013. 3 ~ 2013. 6

◦ 총사업비 : 25백만원

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액	집 행 액			집행잔액 (불용액)	집행잔액 비 율	비 고 (낙찰차액)
		소계	지출액	이월액
기계장치/시설비	25	14	14	-	11	45.5%	-

□ 사업실적 및 향후대책

◦ 사업실적 : 초음파유량계 Xonic-100 1대 및 유량계함 1면 설치완료

□ 불용(또는 이월) 사유

◦ 낙찰차액 : - 백만원     ◦ 예산절감 : 3백만원

◦ 집행잔액 : 8백만원

◦ 상세사유 : 같은 기종의 초음파유량계 중 성능을 비교분석하여 관구경

(500mm)에 맞는 가장 적정하고 최소한의 비용으로 선정하여 원가절감

작성자	소 속	직위	성 명
	보수과	담당	오재승
	☏ 3146-5675	과장	김구식
	작성일자	2014. 2.

사업명 : 1정수장 응집기 제작(개선) 구매설치

기관명 : 영등포아리수정수센터

□ 사업목적

◦ 응집기는 상시 회전하는 기기이며 2000년 설치로 10년 이상 사용됨에 따라 축 크랙 및 파손이 반복되어 이를 개선하여 정수생산에 차질이 없도록 함.

□ 사업개요

◦ 위    치 : 서울시 영등포구 노들로 11, 제1정수장 응집지

◦ 사업기간 : 2013.5.21 ~ 2013.9.12

◦ 규    모 : 응집기 23대 개선

◦ 사업내용 : 1열 7대 개선, 2열 8대 개선, 3열 8대 개선

◦ 총사업비 : 170백만원

□ 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액	집 행 액			집행잔액 (불용액)	집행잔액 비 율	비 고 (낙찰차액)
		소계	지출액	이월액
기계장치/시설비	170	92	92	-	78	46.2%	16

□ 사업실적

◦ 고장이 잦은 수평패들형 응집기 23대를 개선하여 고장빈도 저감에 따른 맛있고 깨끗한 정수생산에 기여

□ 불용관련

◦ 낙찰차액 : 16백만원    ◦ 예산절감 : 53백만원

◦ 집행잔액 : 9백만원

◦ 불용 사유 : 철저한 현장 재분석을 통해 53백만원 예산절감 하였으며,

낙찰차액(16백만원) 및 집행잔액(9백만원) 발생

※ 예산절감 : 당초에는 응집기의 축 개선과 패들(나무판)을 합성수지재로 교체할 계획이였으나,

재분석 결과 패들은(나무판) 향후 5년 이상 더 사용이 가능하여 향후 교체하는 것으로

변경 추진함

작성자	소 속	직위	성 명
	보수과	담당	김오열
	☏ 3146-5671	과장	김구식
	작성일자	2014. 2.

사업명 : 풍납취수장 비상발전기 교체

기관명 :영등포아리수정수센터

□ 사업목적

◦ 노후화된 취수장의 비상발전기를 교체하여 정전 등 비상시 주요설비에 전력을 안정적으로 공급하여 원수 취수에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 풍납취수장

◦ 규    모 : 비상발전기 교체(75KW→130KW)

◦ 사업내용 : 비상발전기 교체, 부대공사 1식

◦ 사업기간 : 2013.4.16 ~ 2013.7.1

◦ 총사업비 : 35백만원

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액	집 행 액			집행잔액 (불용액)	집행잔액 비 율	비 고 (낙찰차액)
		소계	지출액	이월액
기계장치/시설비	35	30	30	-	5	14.7%	1

□ 사업실적 및 향후대책

◦ 사업실적 : 비상발전기 교체(75KW→130KW)로 정전 등 비상시 주요설비에 안정적 전력공급

□ 불용(또는 이월) 사유

◦ 낙찰차액 : 1백만원  ◦ 예산절감 : 4백만원

◦ 집행잔액 : - 백만원

◦ 상세사유 : 전력기술관리법 제12조(공사감리 등) 전력시설물에 대한 공사감리를 해당자격의 자체감리원으로 하여금 감리업무를 수행하여 감리비 절감

작성자	소 속	직위	성 명
	보수과	담당	양묘식
	☏ 3146-5672	과장	김구식
	작성일자	2014. 2.

사업명 : 염소가스용기 구매

기관명 :영등포아리수정수센터

□ 사업목적

◦ 노후 염소용기 폐기물량 등을 감안하여 염소약품 수급을 위해 염소용기 제작 구매

□ 사업개요

◦ 위    치 : 서울시 영등포구 노들로 11, 송파구 올림픽로 41길108

◦ 규    모 : 염소용기 1톤×11개 제작 구매

◦ 사업내용 : 안정적인 염소약품 수급

◦ 사업기간 : 2013. 2 ~ 8월

◦ 총사업비 : 53백만원

□ 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액	집 행 액			집행잔액 (불용액)	집행잔액 비 율	비 고
		소계	지출액	이월액
공기구비품/ 자산취득비	53	53	-	-	53	100%

□ 사업실적

◦ 구의 정수장의 보유 염소용기 10개를 재활용하여 53백만원 예산절감

□ 불용예산 관련

◦ 사업계획취소 : 53백만원

◦ 불용사유 : ‘13,’14년 폐기예정인 염소용기가 총 28개로 안정적인 염소

약품 수급을 위해 염소용기 구매 비 53백만원을 예산요구 하였으나

‘12년 10월에 구의 정수장의 보유 염소용기 10개를 관리 전환 하여

사용하고, 또한 고도정수처리 시설 도입이 완료되어 염소약품 사용량이

감소됨에 따라 염소저장 허가량을 축소 변경(86톤→38톤) 되었기에

미집행

작성자	소 속	직위	성 명
	운영과	담당	안기열
	☏3146-5643	과장	현인식
	작성일자	2014. 2.