2013년 기능보강사업 계획 변경 승인 검토결과

영등포구 영등포종합사회복지관 기능보강사업 계획변경 요청

가. 계획변경 요청사항

◯ 사 업 명 : 장애인용 화장실 설치 및 로비 확보 공사   (단위 : 천원)

구 분	변경전				변경후				비 고
	계	시 비	구 비	자부담	계	시 비	구 비	자부담
총계	40,320	20,160	20,160	-	46,965	20,160	20,160	6,645	추가사업비 자부담 (6,645)
사업내역	✓장애인화장실출입문 : 나무문 → 자동문 교체 ✓남자소변기 2개 → 1개 ✓일반출입문 4개 → 자동문 2개 ✓로비공간에 북카페 조성(추가사업)

나. 변경 사유

- 장애인 이용 편의증진과 공간 활용을 통한 주민복지 증진을 위해서 사업내역 변경 요청

□ 장애인화장실출입문을 나무문에서 자동문으로 교체

□ 화장실 공간을 대변기와 세면대를 구분하여 사용하려던 당초계획을 남녀 각 1개의 통합공간으로 꾸며 휠체어 이용이 용이하도록 남자소변기를 당초 2개에서 1개로 축소

□ 로비공간에 북카페를 조성하여 지역주민들에게 개방

검토결과 : “승인”.

○ 장애인화장실은 휠체어 이용자에 맞게 적정한 규격으로 바꾸기 위한 내용으로(소변기 조정, 자동문 변경 등) 사업변경 적정함.

○ 로비공간에 북카페를 설치하여 지역주민에게 개방하고자 하는 사업으로 1층 화장실과 로비공간의 접근성 및 활용도가 증대되어 사업효과성이 높을 것으로 보여 사업변경 적정함. 단, 사업추가비는 자부담 조건임.