‘13년 성과 관리계획 (핵심)사업명	가정내 급수환경 개선 (BSC - 24)				담당		소속			강서수도사업소
							성명			이용호, 주은선
							전화			3146-3971
시장 공약사항	❈ 녹물 수도관 교체 지원 및 촉진법령 마련
시정운영중장기계획	❈ 옥내 급수체계 관리개선
시장 지시사항
1. 사업개요	□ 노후 옥내급수관 개량비 지원 ○ 사업기간 : ‘13. 1 ~ 12월 ○ 대 상 : 목표가구 3,500 (소요예산 : 2,310백만원) ○ 사업내용 - 옥내배관 노후상태 진단 및 기술지도 상담, 개량가구에 대한 공사비 지원 등 □ 옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거 ○ 사업기간 : ‘13. 3. ~ 12월 ○ 사업목표 : 2,189가구(소요예산 : 278백만원) ○ 사업내용 - 옥상 소형 물탱크 사용 건물의 직결급수 추진 - 옥상에 방치된 미사용 물탱크 철거
	사업종료년도의 최종목표치		5,689가구(옥내급수관개량3,500,직결급수2,189)
	실 시 근 거
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2010년			2011년		2012년			2013년
			1,527			593		1,206			2,588
	예산 집행실적 및 향후전망	구 분	1/4분기			2/4분기		3/4분기			4/4분기
		계 획	252			1,009		1,744			2,588
		집 행	272			570		912			1,390
		집행 실적 저조 사유	옥내개량지원: 세대배관보다 공용배관(지원금이적음) 지원 건수가 많아 예산집행이 저조 직결급수 : 일부 수요가 자체 시행으로 예산절감
		향후 전망
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'13년 목표		4/4분기 목표					실 적
❈ 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수		3,500가구		3,500					5,949
❈ 옥상 물탱크 직결급수 전환 가구수		2,189가구		2189					2,189

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	1/4분기	<노후 옥내급수관 개량비 지원> ○ 노후 옥내급수관 공사비 지원 홍보 협조 요청 - 일 자 : 2013. 1. 17. - 대 상 : 관내 구청 및 동주민센터 - 협조내용 : “구정소식지” 및 동반장회의시 안내. 기관사이트, 청사내 게시판 안내문 게첨 ○ 노후 옥내급수관 공사비 지원 안내 - 일 자 : 2012. 1. 17 - 대 상 : 아파트 관리소장 및 주민대표(대아신동아아파트 외 94개소) ○ 『2013년도』 노후 옥내급수관교체 추진계획 수립 - 일 자 : 2013. 1. 29 - 계 획 : 3,500가구(2,310백만원) ○ 옥내 노후급수관 개량비 지원 심의 및 승인 - 일 자 : 2013. 3. 25 - 주 소 : 양천구 신청3동 733-1 신정수정아파트(220세대) ○ 옥내배관 전수조사 기간제 근로자 채용 - 조사기간 : ‘13.3 ~5월(3개월) - 인 원 : 14명 - 추진내용 : 주택방문 조사 및 홍보(안내문 배포) 23,000가구 <옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거> ○ 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 계획수립 - 일 자 : 2013.3.7 - 목 표 : 2,189가구(직결급수전환:469, 물탱크철거:1,720) - 예 산 : 278백만원 ○ 소형물탱크 사용건물에 대한 직결급수 전환 홍보 협조 요청 - 일 자 : 2013.3.11 - 대 상 : 강서구청,구로구청,양천구청 - 내 용 : 구청홈페이지, 구정소식지에 안내문 게제토록 협조 요청 (직결급수전환 및 물탱크철거 무료 시행 안내문)
	2/4분기 3/4분기	<노후 옥내급수관 개량비 지원> ○ 옥내 노후급수관 교체공사 준공 - 일 시 : 2013. 5. 21 - 위 치 : 신정수정아파트(220세대) ○ 옥내 노후급수관 개량비지원 심의 - 일 시 : 2013. 6. 10 - 위 치 : 가양2단지아파트(1,624세대) <옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거> ○ 소형물탱크 사용건물에 대한 직결급수 전환 홍보 협조 요청 - 일 자 : 2013.6.20 - 대 상 : 강서구청,구로구청,양천구청 - 내 용 : 구청홈페이지, 구정소식지에 안내문 게제토록 협조 요청 (직결급수전환 및 물탱크철거 무료 시행 안내문) ※ 직결급수전환 완료 : 6월말(100% 목표달성) <노후 옥내급수관 개량비 지원> ○ 옥내 노후급수관 공사비 지원 안내문 발송 - 일 자 : 2013. 7. 16 - 대 상 : 강서구 공항동 652번지 등 1,280개소 주택 ○ 옥내 노후급수관 개량비 지원 심의(공용배관) - 일 자 : 2013. 8. 12 - 대 상 : 개봉건영아파트(209세대), 서울가든아파트(715세대) ○ 옥내 노후급수관 개량비 지원(준공검사) - 일 자 : 2013. 8. 20 - 대 상 : 가양2단지아파트 공용배관(1,624세대) ○ 옥내 노후급수관 공사비 지원 안내 - 일 자 : 2013. 9. 3 - 대 상 : 아파트 관리소장 및 주민대표(한강타운아파트 외 88개소) <옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거> ○ 소형물탱크 사용건물에 대한 직결급수 전환 홍보 협조 요청 - 일 자 : 2013. 7. 22 - 대 상 : 강서구청,구로구청,양천구청 - 내 용 : 구청홈페이지, 구정소식지에 안내문 게제토록 협조 요청 (직결급수전환 및 물탱크철거 무료 시행 안내문) ○ 직결급수 전환 및 미사용 물탱크 철거 대상 집중 홍보 실시 - 일 자 : 2013. 9.1 ~ 9.30 - 대 상 : 직결급수 미전환 및 미사용 물탱크 존치 세대 - 내 용 : 지역 담당자별로 현장에 직접 방문하여 홍보
	4/4분기	<노후 옥내급수관 개량> ○ 옥내 노후급수관 개량비 지원(준공검사) - 일 자 : 2013. 10. 21. - 대 상 : 서울가든아파트(715세대) ○ 옥내 노후급수관 개량비 지원(준공검사) - 일 자 : 2013. 11월 ~ 12월 - 대 상 : 개봉건영아파트(209세대), 등촌우성아파트(110세대) ○ 옥내 노후급수관 개량비지원 심의 및 승인(공용배관) - 일 시 : 2013. 11월 ~ 12월 - 위 치 : 목동13단지아파트(2,280세대), 신안약수아파트(440세대) <옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거> ○ 직결급수 전환 및 미사용 물탱크 철거 대상 현장 방문 홍보 - 일 자 : 2013. 10. 1 ~ 10. 30 - 대 상 : 직결급수 미전환 및 미사용 물탱크 존치 세대 - 내 용 : 지역 담당자별로 현장에 직접 방문하여 집중 홍보
5. 검토 및 개선사항
6. 향 후 계 획		<노후 옥내급수관 개량> ○ 노후 옥내급수관 공사비 지원 홍보 협조 요청 - 대 상 : 관내 구청 및 동주민센터 - 협조내용 : “구정소식지” 및 동반장회의시 안내. 기관사이트, 청사내 게시판 안내문 게첨 ○ 『2014년도』 노후 옥내급수관교체 추진계획 수립 ○ 노후 옥내급수관 공사비 지원 안내(공용배관 집중 홍보) - 대 상 : 노후아파트 관리소장 및 주민대표 <옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거> ○ 2014년도 소형물탱크 직결급수 및 철거 계획 수립 ○ 담당자별 수요가에 직접 방문 개별 홍보 및 독려
7. 평가결과 전 분 기 지적사항 및 조치사항	구 분	지적사항	조치사항
	1/4 분기
	2/4 분기
	3/4 분기
	4/4 분기