□  하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	명시이월내용	예산과목	예산액	2014 이월액	이 월 사 유
물재생시설 개선 및 관리	물재생시설 개선	마곡지구내 재생수 공급	시설비	계 시설비 감리비	10,500,000 10,100,000 400,000	5,846,400 5,734,400 112,000	∘ 마곡도시개발계획 변경에 따른 마곡단지 입주지연으로 재이용수를 사용하는 수요처가 없어 재생수 공급시기를 조정(`14.10→`16.6)하고 이에 따라 `15년말까지 공사를 완료해야하기 때문에 기 계약된 기계, 전기공사의 공사비 및 관급 자재비를 명시이월. ※ 마곡지구내 재생수 공급사업 현안처리 및 사업 내실화 방안(행정2부시장 방침 제294호, 2013.9.23.) ⇒ 공급시기 확정 : 2016. 6월 ∘ 명시이월내역 : - 기계공사비(기 계약) : 1,087,396천원 - 전기공사비(기 계약) : 639,790천원 - 통신공사비(기 계약) : 29,722천원 - 관급기자재(기 계약) : 815,044천원 - 관급기자재(미 계약) : 3,162,448천원 - 감리비(기 계약) : 112,000천원