지하철 9호선연장건설(2단계) 송변전공사

(도시기반시설본부 도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위  치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규  모 : 연장 4.5㎞

- 변전소 1개소, 수전선로 1.14km, 연락송배전 22.9kV 1구간.

- 6.6kV 정거장 전기실(5개소)

◦ 기  간 : `13.1.15 ～ `14.9.11(`14.2월말 현재 공정율 100%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선2단계건설,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분			예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			407,723,000	407,723,000	407,723,000	307,723,000	100,000,000	0
공 사 비			407,723,000	407,723,000	407,723,000	307,723,000	100,000,000	0
	도 급 비		407,723,000	407,723,000	407,723,000	307,723,000	100,000,000	0
	관급비	소계
		AC
		DC
		에너지
		원제
보 상 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 시운전 및 성능검증을 위한 준공유보금

지하철 9호선연장건설(2단계) AC설비 제작설치

(도시기반시설본부 도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위 치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규 모

- 22.9kV 수배전반 : 11면          - 6.6kV 고압수배전반 : 3면

- 22.9kV/6.6kV 변압기반 : 3면    - 저압배전반 : 18면

◦ 기 간 : `12.12.28 ～ `14.8.20(`14.2월말 현재 공정율 100%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선2단계건설,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분			예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			602,073,000	602,073,000	602,073,000	507,473,000	94,600,000	0
공 사 비			602,073,000	602,073,000	602,073,000	507,473,000	94,600,000	0
	도 급 비
	관급비	소계	602,073,000	602,073,000	602,073,000	507,473,000	94,600,000	0
		AC	602,073,000	602,073,000	602,073,000	507,473,000	94,600,000	0
보 상 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 시운전 및 성능검증을 위한 준공유보금

지하철 9호선연장건설(2단계) DC설비 제작설치  (도시기반시설본부 도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위 치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규 모

- 정류기용 변압기반 : 3면    - 정류기반  : 3면

- 직류고속도차단기반 : 9면

◦ 기 간 : `13.1.07～ `14.8.30(`14.2월말 현재 공정율 100%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선2단계건설,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분			예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			670,620,000	670,620,000	670,620,000	470,620,000	200,000,000	0
공 사 비			670,620,000	670,620,000	670,620,000	470,620,000	200,000,000	0
	도 급 비
	관급비	소계	670,620,000	670,620,000	670,620,000	470,620,000	200,000,000	0
		DC	670,620,000	670,620,000	670,620,000	470,620,000	200,000,000	0
보 상 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 시운전 및 성능검증을 위한 준공유보금

지하철 9호선연장건설(2단계) 에너지저장장치 제작설치  (도시기반시설본부 도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위 치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규 모

- 에너지 저장장치(1,000kW) : 1식

◦ 기 간 : `13. 1. 8 ～ `14.8.31(`14. 2월말 현재 공정율 100%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선2단계건설,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분			예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			678,032,000	678,032,000	678,032,000	463,680,000	214,352,000	0
공 사 비			678,032,000	678,032,000	678,032,000	463,680,000	214,352,000	0
	도 급 비
	관급비	소계	678,032,000	678,032,000	678,032,000	463,680,000	214,352,000	0
		ESS	678,032,000	678,032,000	678,032,000	463,680,000	214,352,000	0
보 상 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 시운전 및 성능검증을 위한 준공유보금

지하철 9호선연장건설(2단계) 원방제어설비 제작설치  (도시기반시설본부 도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위 치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규 모

- 전력 관제설비 : 1식

- RTU설비      : 변전실 1면, 정거장 5면, 환기실 5면

◦ 기 간 : `12.12.27～ `14.8.19(`14. 2월말 현재 공정율 90%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선2단계건설,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분			예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			287,745,000	287,745,000	287,745,000	227,745,000	60,000,000	0
공 사 비			287,745,000	287,745,000	287,745,000	227,745,000	60,000,000	0
	도 급 비
	관급비	소계	287,745,000	287,745,000	287,745,000	227,745,000	60,000,000	0
		ESS	287,745,000	287,745,000	287,745,000	227,745,000	60,000,000	0
보 상 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 시운전 및 성능검증을 위한 준공유보금

지하철9호선 연장건설(2단계) 전차선공사

(건설총괄부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위 치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규 모 : 전차선로 4.5km, 정∙부 급전선 포설 1.2km

- Al. T-Bar설치    : 4,043m         - Al. T-Bar 용접 : 1,003개소

- Trolly Wire가설  : 10,160m       - 표지류 등 1식   : 1식

◦ 기 간 : `13. 9. 23 ～  `14. 9. 11(`14. 2월말 현재 공정율 98%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선2단계건설, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		652,856,000	652,856,000	652,856,000	565,500,000	87,356,000	-
공 사 비		652,856,000	652,856,000	652,856,000	565,500,000	87,356,000	-
	도 급 비	652,856,000	652,856,000	652,856,000	565,500,000	87,356,000	-
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

※ 용역 및 물품구매인 경우에도 상기서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦ 이월사유

- 시운전 및 성능검증을 위한 준공 유보금

지하철9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사

(도시철도설비부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위 치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규 모 : 본선 4.5km, 5개 정거장 통신케이블 및 통신설비

◦ 기 간 : `13.10.29 ～ `14.9.11(`14. 2월말 현재 공정율 75%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선2단계건설,시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		580,596,000	580,596,000	580,596,000	430,596,000	150,000,000
공 사 비		580,596,000	580,596,000	580,596,000	430,596,000	150,000,000
	도 급 비	580,596,000	580,596,000	580,596,000	430,596,000	150,000,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦ 이월사유

- 시운전 및 성능검증을 위한 준공 유보금

지하철9호선연장건설(2단계) 시스템분야 전면책임감리용역

(도시철도설비부/도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위 치 : 서울시 강남구 논현동 ~ 송파구 잠실종합운동장

◦ 규 모 : 시스템공사(송변전, 전차선, 정보통신, 신호) 책임감리용역

◦ 기 간 : `12.11.20 ～  `15.1.8 (`14. 2월말 현재 공정율 : 65%)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도시기반시설본부,도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선2단계건설, 시설비및부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지출액 (D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		299,930,000	299,930,000	299,930,000	-	299,930,000	-
감 리 비		299,930,000	299,930,000	299,930,000	-	299,930,000	-
	도 급 비	299,930,000	299,930,000	299,930,000	-	299,930,000	-
	관 급 비	-	-	-	-	-	-
보 상 비		-	-	-	-	-	-
이전비․기타		-	-	-	-	-	-

◦ 이월사유

- 9호선 2단계 시스템분야(송변전, 전차선, 정보통신, 신호) 시설공사 착공시기변경으로 감리원 투입시기를 조정(`12.11월 ⇒ `13.3월)함에 따라,

- 2차 감리용역 변경 계약체결로 예산집행 시기 미 도래로 인한 용역비를 사고이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.