58) 관악산 저류조 설치사업

사업현황

○ 사업 개요

- 위치 및 규모

․서울대 정문 앞 40,000㎥

․서울대 내 2개소 25,000㎥(공대폭포 5,000㎥, 버들골20,000㎥)

- 사업기간 : ’11.10.27 ~ ’15.5. (공정률 : 70 %)

- 사 업 비 : 46,636백만원

○ 추진 경위

- ’11.7.27 : 관악산 일대 기습폭우

- ’11.9.14 : 관악산 저류조 긴급공사 시행계획 결정

- ’11.12~’12.6 : 서울대와 시민단체 사업반대 협의

- ’12.6.20 : 사업계획 변경방침(행정2부시장 방침 제205호)

- ’12.7~’13.8 : 임시저류조 설치, 3회 운영

- ’13.2.14 : 구조물 본체 공법선정

- ’11.10~’14.10 현재

․ 서울대 내 버들골 2만톤, 공대폭포 5천톤 사업완료

․ 서울대 정문앞 4만톤 금년도 우기 임시저류조 운영, 2015년 완료

갈등개요

○ 갈등배경 및 원인

- 서 울 대 : 서울대 정문 앞 저류조 설치 시 서울대의 지하이용계획 배치

- 시민단체  : 도림천변 생태공원 일대 천변저류시설에 대해 기술 및 환경측면 문제점을 들어 사업반대, 서울대정문앞 저류조 설치 요구

○ 발생 시기 : ’11.12월

이해

관계자

이해관계자		요구 사항
서울대학교		·정문 앞 저류조 설치 반대 ·생태공원 내 홍수조절시설 등 시설 분산설치
도림천을 살리는 주민모임 푸른공동체 살터		·생태공원 내 홍수조절시설은 시설 전도의 위험과 환경훼손이 있어 사업 반대 ·서울대 정문앞 저류조 설치
서울시	하천관리과	·서울대 정문앞 저류조 설치

대응조치

○서울시, 서울대학교 및 시민단체 협의, 합의도출, 사업계획 변경(’12.6.20)

- 당초 : 서울대정문앞 1개소 6만톤

- 변경 : 서울대정문앞 1개소 4만톤

서울대 내 버들골 2만톤, 공대폭포 0.5만톤

향후계획

○’15.5 : 공사 준공

59) 강남역 일대 침수방지

사업현황

○ 사업 개요

- 위   치  : 강남역일대 및 반포천

- 규   모  : 강남역일대 및 반포천 유역 11개 배수분구

- 사업기간 : ’13. 3 ~ ’15. 2 (설계)

- 사 업 비 : 7,000백만원 (추정가) - 시행방안에 따라 변경

○ 추진 경위

- ’12. 8. 7  : 주요 침수취약지역 해소대책 논의 T/F 1차회의

- ’12. 9.20  : 주요 침수취약지역 해소대책 논의 T/F 2차회의

- ’12.12.26  : 강남역일대 배수개선대책 검토 및 기본·실시설계용역 시행 방침

- ’13. 3.21  : 주요 침수취약지역 해소대책 숙의

- ’13. 3. 4 ~ ’15. 2 : 용역시행

갈등개요

○ 갈등배경 및 원인

- 집중호우 시 인근 고지대 빗물이 저지대인 강남역 일대로 집중되어 도로침수등 침수피해가 발생되어 근본적인 침수 해소대책 요구 (대심도 터널 등)

○ 발생(예상)시기 : ’11. 7.27일 침수피해 발생이후

이해

관계자

이해 관계자		요구 사항
지역주민		·침수방지사업 조속 추진
서초구		·강남역일대 침수방지를 위한 대심도 빗물저류배수 시설 조속 추진
서울시	하천관리과	·강남역 일대 침수는 다양한 원인이 복합적으로 작용하여 발생하기 때문에 대심도 또는 유역관리 하수도관 등 단일안으로는 문제해결이 어려움 ·현재 대심도터널 방식과 같이 고지대 빗물이 저지대인 강남역 일대로 유입되지 못하도록 하는 유역분리 하수관거 설치와 그 외, 강남역 일대의 다양한 침수원인을 해소하기 위해 하수도관 및 빗물펌프장 개선 등 종합적인 설계를 시행중에 있음

대응조치

○ 설계 중 전문가들의 충분한 검토와 의견을 들어 합리적인 방안을 선정하여 단계별 대책 추진   (주민설명회 등 인근 주민 의견수렴 병행시행)

향후계획

○ 강남역 일대 배수개선 대책 수립 및 공사시행 (’15.2월까지 설계완료예정)