우이-신설 도시철도 민간투자사업 시스템분야 책임감리용역

(도시기반시설본부 도시철도설비부)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 우이동~성신여대입구~보문~신설동

◦ 규    모 : 11.4㎞(정거장 13개소, 차량기지 1개소)

◦ 용역기간 :  `12. 1. 9 ~ `15. 5. 8 (40개월)

◦ 총사업비 : 2,714백만원 (3차용역 407,842천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 신교통수단 도입, 경전철 건설사업, 우이~신설 지하

경전철 건설, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월 세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		500,000,00	500,000,000	500,000,000	92,158,000	407,842,000	-
용 역 비		500,000,00	500,000,000	500,000,000	92,158,000	407,842,000
	도 급 비	500,000,00	500,000,000	500,000,000	92,158,000	407,842,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 우이~신설 도시철도 공사기간 연장에 따른 감리용역 기간 연장

∙보조감리원 2명 투입 중지

∙투입예정 보조감리원 3명 미투입