2014년도 에너지기술개발사업 실증단지 추진계획(案)

(2014년도 신재생에너지 융합핵심기술 사업, 산업통상자원부 공고 제 2014-85호)

□ 추진개요

ㅇ 과 제 명 : 1,000V급 직류 신호 버스(DC BUS) 기반의 경제급전용 독립계통 태양광 발전 시스템 기술개발 및 100kW급 시스템 실증

ㅇ 사업기간 : 2014.6.1.~2022.5.31.(기술개발기간 : 2014.6.1.~2017.5.31.)

ㅇ 참여기업 : (주)에스에너지, 한국전기연구원 외 5개사

ㅇ 과제내용

- 1,000V급 DC BUS 연계 기술의 확보

- 1,500V급 태양광 모듈의 상용화

- DC BUS의 제어/보호 협조 및 확장성이 용이한 개방형 경제급전용 EMS의 개발

- 100kW급 태양광+ESS 융복합 시스템 표준화 기술개발 및 상품화

- 독립 계통운영 자체소비, 전력부족시 한전전력 사용 개방형 프로토콜 개발

- 독립형 태양광 발전시스템의 국내외 표준 제안

- 국내외 각 100kW급 실증 시스템 구축 및 운전 분석(서울시, 하와이)

□ 시스템 개발 및 실증 방안

ㅇ 시스템 용량 : 100kW급 독립계통(자가용 사용) 태양광 발전 시스템

ㅇ 소요예산 : 한국에너지기술평가원 연구과제 지원 사업비로 구축

ㅇ 실증대상지 선정

- 태양광 100kW, 에너지저장시스템(ESS) 150kWh, 전력변환장치 등을 설치할 수 있는 공공장소 장소(약 300평)

- 독립형 태양광 발전 시스템 적용이 용이한 적정지로 초·중고등학교를 추천 받아 연구과제 주관기관에서 사업추진 적정성 검토 후 최종 선정

ㅇ 시스템 운전 방식

- 태양광 발전 전력을 ESS에 충전 및 부하량에 따라 발전전력 및 충전 전력 사용

- 태양광 및 ESS 부족 전력시 상전계통을 절체하여 사용

ㅇ 시스템 구성(안)

ㅇ 주요설비

□ 기대효과

ㅇ 서울과 같은 도심지역 실증사업 추진으로 도심형 신재생에너지 보급 비즈니스 모델 개발로 소규모 분산전원 시장 조성 및 해외 시장 개척

ㅇ 1,000V급 DC BUS기반 100kW급 경제급전용 태양광 발전시스템 시장창출

□ 향후계획

ㅇ 실증대상 사업지 후보 추전 및 선정 : 2014.12월

ㅇ 사업추진 협약 및 실시설계 : 2015.1월까지

ㅇ 사업추진 : 2017.5.31까지 실증사업 추진(관리기간 : 2022.5.31.)