‘14년 사업 조기발주 세부추진 계획

【공 사】                                     (단위 : 백만원)

연번	공 사 명	예 산 액	사업기간	추 진 일 정								담당자	비 고
				물량 산출	설계서 작 성	계약심사	발주 품의	입찰공고 (입찰일)	적격 심사	계 약	착 공
계		8,180
1	동호대교 보수공사	1,000	‘14. 1 ~ 12	2. 25	2. 28	3. 5 ~ 3. 12	3. 14	3. 17 (3. 25)	3. 25 ~ 3.30	3. 31	3. 31	김형섭	설계용역 (2.20.완료)
2	동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사	2,000 (설계 134, 감리 63)	‘14.1 ~ 12	○ 설계용역 설계서 작성 : ‘14. 1. 24. ○용역타당성 의뢰 : ‘14. 1. 29 ○ 실시설계용역 발주 : ‘14. 2. 10(용역완료 5. 30)								김형섭
3	영동대교 보수공사	1,600 (설계 50)	‘14.1 ~ 12	○ 설계용역 설계서 작성 : ‘14. 1. 24. ○용역타당성 의뢰 : ‘14. 1. 29 ○ 실시설계용역 발주 : ‘14. 2. 10(용역완료 4. 15)								김근섭
4	한강교량일상유지보수공사 (광진교외 3개소)	976	‘14. 3 ~ ‘15. 2. 28	1. 31	2. 5	2. 6 ~ 2. 12	2. 14	2. 15 (2. 21)	2. 22 ~ 2. 26	2. 28	2. 28	이기승	연간 단가
5	한강교량 긴급복구 비축자재 정비	550	‘14. 3 ~ 10	1. 31	2. 5	2. 6 ~ 2. 12	2. 14	2. 15 (2. 21)	2. 22 ~ 2. 26	2. 28	2. 28	김중철
6	자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수공사	690	‘14. 3 ~ ‘15. 2. 28	1. 31	2. 5	2. 6 ~ 2. 12	2. 14	2. 15 (2. 21)	2. 22 ~ 2. 26	2. 28	2. 28	김근섭	연간 단가
7	자양고가 보수 및 포장개량공사	250
8	아차산교 교면포장 개량공사	1,042	‘14. 3 ~ 10	1. 31	2. 8	2. 10 ~ 2. 14	2. 17	2. 19 (2. 26)	2. 27 ~ 3. 7	3. 10	3. 10	정)김중철 부)이기승