1. 9호선 2단계 건설(시스템분야 및 정거장 설비)

(1) 연 번	도시철도설비부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	도시철도설비부		담당자		김흥정, 정해철					전화번호			772-7270
(4) 상위 전략목표	철저한 공정관리로 차질없는 도시철도건설						상위KPI		9호선연장 2단계 건설 (시스템분야 및 정거장 설비)
(5) 전략/성과목표	철저한 공정관리로 차질없는 도시철도건설
(6) 2013년 목표값	100		(7) 지표단위					%			(8) 가 중 치			70
(9) 지 표 산 식	사업추진에 따른 시스템분야 추진 공정률(%)
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 사 업 명 : 9호선 2단계(시스템 및 정거장 설비분야) 건설 - 사업기간 : 2008. 05 ~ 2014. 12 - 사업구간 : 논현동~삼성동COEX~종합운동장(4.5km 정거장5개소) ○ 시스템 및 정거장 설비 분야 추진 일정 - 시스템분야 실시설계용역 발주 : 5% - 공사 발주 : 10% - 공사 착공 : 20% - 한전수전 및 시스템 시운전 : 70% - 종합시운전 완료 : 90% - 영업시운전 완료 : 100%
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			8%
	2012년(Y-2) 실적			20%
	2013년(Y-1) 실적			60%
	20014년(Y) 목표			100%
	2015년(Y+1) 목표			-
	목표 값 설정근거			2014년 성과관리계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 합산값 ( ) 시점값(○)
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기						4/4분기 (하반기)
	60	80				90						100%

2. 우이~신설 경전철건설(시스템분야)

(1) 연 번	도시철도설비부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	도시철도설비부		담당자		김흥정 .윤창현					전화번호		772-7270
(4) 상위 전략목표	신교통수단 도입･건설						상위KPI		우이~신설 경전철 건설 (시스템 분야)
(5) 전략/성과목표	신교통수단 도입･건설
(6) 2014년 목표값	24		(7) 지표단위					%		(8) 가 중 치		10
(9) 지 표 산 식	사업추진에 따른 시스템분야 추진 공정률(%)
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 사 업 명 : 우이 ~ 신설 경전철 건설(시스템분야) - 사업기간 : 2009. 9. ~ 2016. - 사업구간 : 우이동~삼양로~정릉~성신여대~신설동(11.4km 정거장13개소) ○ 사업 추진에 따른 일정 - 실시계획 승인 : 3% - 실시설계 완료 : 5% - 공사 착수 : 10% - 최초 차량 반입 : 80% - 종합시운전 : 100%
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			5%
	2012년(Y-2) 실적			15%
	2013년(Y-1) 실적			22%
	2014년(Y) 목표			24%
	2015년(Y+2) 목표			50%
	목표 값 설정근거			2014년 성과관리계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 합산값 ( ) 시점값(○)
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기					4/4분기 (하반기)
	22%	22%				23%					24%