주간 진척보고서				시스템명		2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스
문서번호	R1401017	작성자	박철희	작성일	2014/10/17	버 전	1.2

프로젝트명	2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	22.0/50	5.2/40	5.0/10	32.2/100
		실적	15.0/50	0.5/40	5.0/10	20.5/100

주요 내용	1. 시스템 항공사진 정보 보기 및 검색 2. 항공사진 DB 상세 설계 및 정제
업무구분	금 주 실 적 (2014.10.13 ~ 10.17)	차 주 계 획 (2014.10.20 ~ 10.24)
시스템개발	1. 시스템 구현 - 메타데이터 보기 - 연도별 항공사진 비교보기 - 항공사진 검색(위치검색) 2. DB 설계 - 데이터베이스 상세 설계 및 정제 3. 메타데이터 보기 - 항공사진 시민서비스 DB연결 및 메타 데이터 질의 및 정의	1. 시스템 구현 - 메타데이터 보기 - 연도별 항공사진 비교보기 - 항공사진 검색(도엽검색) 2. DB 설계 - 데이터베이스 상세 설계 및 정제 3. 메타데이터 보기 - 항공사진 시민서비스 DB연결 및 메타 데이터 질의 및 정의
항 공 사 진 D B 구 축		1. 2014년도 촬영 항공사진 입수 및 분석 - 보안처리 항공사진 분석 및 취합 2. 국군기무사 보안처리 - 보안지역 Covering 작업 3. 204년도 항공사진 메타 데이터 구축 - 성과상세내역, 촬영정보 DB구축
기타		항공사진(전자매체) DRM 적용 정책협의
이슈사항