주간 진척보고서				시스템명		2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스
문서번호	R1401219	작성자	박철희	작성일	2014/12/19	버 전	1.2

프로젝트명	2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	42.3/50	34.8/40	8.1/10	85.2/100
		실적	25.2/50	26.8/40	7.9/10	59.9/100

주요 내용	1. 항공사진 효과조정 및 파일 포맷 재정의 구현 2. 항공사진 변환 및 파일명 표준화 작업 3. 국정원 보안 검수 의뢰
업무구분	금 주 실 적 (2014.12.15 ~ 12.19)	차 주 계 획 (2014.12.15 ~ 12.26)
시스템개발	1. 시스템 구현 - 항공사진(원본) 보기 효과조정 기능 구현 - 흑백전환 및 특성설정 기능 구현 - 파일 포맷 재정의 2. 시도행정 정보 검색 - WSDL 통신여부 테스트 및 구현 - GPKI 암/복호화 테스트 및 구현	1. 시스템 구현 - 온라인 민원(전자매체)을 위한 파일 업로드 정의 및 기능 구현 - 온라인 민원(전자매체)을 위한 파일 다운로드 및 DRM 파일 포맷정의 구현 2. 시도행정 정보 검색 - 원본관리 시스템의 온라인 민원(전자매체) 정보 검색 및 승인 처리 구현
항 공 사 진 D B 구 축	1. 2014년도 촬영 항공사진 파일 이관 - ECW, 이관(인트라넷)	1. 2014년도 촬영 항공사진 파일 이관 - Thumbnail, Tiff 이관(인트라넷, 원본관리)
기타		1. 교육계획 수립 - 사용자/운영자 교육계획 수립
이슈사항