주간 진척보고서				시스템명		2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스
문서번호	R140808	작성자	박철희	작성일	2014/8/08	버 전	1.0

프로젝트명	2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	4.0/100	0.5/100	11.7/100	3.3/100
		실적	3.0/100	0.5/100	11.7/100	2.8/100

업무구분	금 주 실 적 (2014.08.04 ~ 08.08)	차 주 계 획 (2014.08.011 ~ 08.14)
시스템개발	1. 사용자 인터뷰 - 인터뷰계획서 2. 아키텍쳐 설계	1. 요구사항분석 - 인터뷰 계획서 - 인터뷰 결과보고서 - 요구사항 분석 및 정의 2. 아키텍쳐 설계 - 항공사진통합관리원스톱서비스 구현방안 정립
항 공 사 진 D B 구 축	1. 항공사진 DB 구축 관련 업무 절차 및 일정 수립	1. 항공사진 DB 구축 관련 업무 절차 및 일정 수립
기타	착수보고 자료 작성 준비 2014년 스마트국토엑스포 지원 - 판넬 디자인 검토 - 리플렛 및 판촉물 협의 항공사진 홍보용 자료 작성	착수보고 발표 2014년 스마트국토엑스포 지원 - 판넬 디자인 검토 - 리플렛 및 판촉물 협의 - 테마 서비스 홍보동영상 협의 항공사진 홍보용 자료 작성
이슈사항