주간 진척보고서				시스템명		2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스
문서번호	R150109	작성자	박철희	작성일	2015/01/09	버 전	1.2

프로젝트명	2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	45.3/50	37.2/40	9.4/10	91.9/100
		실적	41.8/50	27.6/40	9.3/10	78.7/100

주요 내용	1. 온라인 민원(전자매체) 업로드/다운로드 기능 구현 2. DRM 및 파일 포맷정의 구현 3. 전자매체 통계정보 구현
업무구분	금 주 실 적 (2015.01.05 ~ 2015.01.09)	차 주 계 획 (2015.01.12 ~ 2015.01.16)
시스템개발	1. 시스템 구현 - 온라인 민원(전자매체)을 위한 파일 업로드 정의 및 기능 구현 - 온라인 민원(전자매체)을 위한 파일 다운로드 및 DRM 파일 포맷정의 구현 - 사용자 인증 공공/나이스 I-PIN 적용 - 전자매체 통계정보 구현	1. 시스템 테스트 - 항공사진 뷰어 최종 테스트 및 보완 (전자매체 승인, 전자매체 다운로드, 전자매체 파일 열기, 전자매체 DRM 출력) - 원본관리 시스템 전자매체 승인 처리 - 민원 신청(전자매체) 조회 및 승인
항 공 사 진 D B 구 축	1. 2014년도 촬영 항공사진 파일 이관 - Thumbnail, Tiff 이관(원본관리) 완료	1. 2014년도 촬영 항공사진 국정원 보안 처리 - 국정원 보안 지역 검토 - 국정원 보안 처리 규정에 의한 블러링, 커버링, 해상도 저하
기타		완료보고 자료 작성 및 보고회 준공처리를 위한 자료 산출물 정리 검수확인서 작성
이슈사항