주간 진척보고서				시스템명		2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스
문서번호	R150116	작성자	박철희	작성일	2015/01/16	버 전	1.2

프로젝트명	2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	50.0/50	38.8/40	10/10	98.8/100
		실적	50.0/50	34.8/40	10/10	94.8/100

주요 내용	1. 완료보고회 2. 시스템 테스트 3. 국정원 보안규정 처리
업무구분	금 주 실 적 (2015.01.12 ~ 2015.01.16)	차 주 계 획 ( )
시스템개발	1. 시스템 테스트 - 항공사진 뷰어 최종 테스트 및 보완 (전자매체 승인, 전자매체 다운로드, 전자매체 파일 열기, 전자매체 DRM 출력) - 원본관리 시스템 전자매체 승인 처리 - 민원 신청(전자매체) 조회 및 승인	1. 시스템 안정화 및 의견수렴
항 공 사 진 D B 구 축	1. 2014년도 촬영 항공사진 국정원 보안 처리 - 국정원 보안 지역 검토(총 169매) - 국정원 보안 처리 규정에 의한 블러링, 커버링, 해상도 저하 작업 (80매 보안처리 완료) 총 160매 중 80매 처리	1. 2014년도 촬영 항공사진 국정원 보안 처리 - 국정원 보안 처리 규정에 의한 블러링, 커버링, 해상도 저하 작업
기타	1. 완료보고회 자료 준비 및 작성 - 일시 : 2015, 01, 15(목), 10:00 ~ 11:00 - 장소 : 서소문청사 1동 3층 스마트 정보지원센터	준공신청서 제출
이슈사항