□ 공통 요구자료 (산하사업소 포함)

7. 설계변경 공사현황    ‥ (교통운영과)

- 총차를 기준으로 최종 설계변경 사항 기재

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
2014년 노면표시 일상유지 보수공사 (연간단가)	엠에이치건설㈜	‘14.03.19	‘15.02.28	326,909,250	1	‘14. 12.19	‘14.12.26	411,000,000	노면표시 물량증가	남부도로사업소 도로보수과 (정철식, 3284-5442)
2014년 교통부속물 유지보수공사 (연간단가)	정우건설산업(주)	‘14.03.25	‘15.02.28	56,857,800	1	‘15. 02.23	‘15.02.26	54,681,000	물량감소	남부도로사업소 도로보수과 (조경현, 3284-5441)