문서번호	도로보수과-9594
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		10/27 이규철
협 조
	주무관		이상하

2014년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  10. 27(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제2차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 해마건설(주) 대표 송흥섭

○ 총공사비 : 119,657,330원(관급자재 포함)

○ 공사규모

- 델리네이터 설치 및 철거  N=  3개소

- 갈매기표지 설치 및 철거  N=  6개소

- 도로반사경 설치 및 철거  N=  3개소

- 시선유도봉 설치 및 철거  N=340개소

- 도로표지병 설치 및 철거  N=170개소

- 장애물표적표지 설치      N=   3개소

- 무단횡단금지시설 세척    N=6,573㎡

- 시선유도봉 세척          N=1,000㎡

- 중앙분리대 설치(주간)    N=  11개소

- 중앙분리대 설치(야간)    N=  44개소

□ 설계변경 사유

○ 2014년 교통안전부속물 유지보수공사 집행잔액(낙찰차액) 사용계획 보고(도로보수과-8599, ‘14.09.25) - 9,632천원

○ 2014년 교통사고잦은곳 개선사업(신촌교회 앞) 공사시행 요청 및 예산재배정(교통운영과-16231, ‘14.08.29) - 14,347천원

- “2014년 교통사고잦은곳 개선사업” 지점 중 신촌교회 앞으로 긴급히 공사를 완료하여 교통사고 예방 및 피해를 줄이고자 기 시행중에 있는 ‘14년 교통안전 부속물유지보수공사 연간단가에 포함 시행.

○ 금화터널 주변 교통안전시설물 개선공사 협조요청 및 예산재배정(교통운영과-18498, ‘14.10.06) - 5,875천원

- 특별도로교통안전진단 시행구간으로 긴급히 공사를 완료하여 교통사고 예방 및 피해를 줄이고자 기 시행중에 있는 ‘14년 교통안전 부속물유지보수공사 연간단가에 포함 시행.

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	119,657,330	149,511,380	증) 29,854,050
도 급 비	74,824,000	87,129,360	증) 12,305,360
관급자재비	44,833,330	62,382,020	증) 17,548,690

○ 주요공정 및 수량 변경내역

공 사 명	단위	당 초	변 경	증·감
델리네이터 설치 및 철거	개	3	3	-
갈매기표지 설치 및 철거	개	6	14	증) 8
도로반사경 설치 및 철거	개	3	3	-
시선유도봉 설치 및 철거	개	340	342	증) 2
도로표지병 설치 및 철거	개	170	260	증) 90
장애물표적표지 설치	개	3	3	-
무단횡단금지시설 세척	㎡	6,573	7,903	증) 1,330
시선유도봉 세척	㎡	1,000	1,076	증) 76
개방형중분대설치(주간)	경간	11	11	-
개방형중분대설치(야간)	경간	44	44	-

○ 예산별 집행내역

(단위 : 원)

공 사 명	예산현액 (배정액)	발주 집행액			잔 액	비 고
		도급비		관급자재 등
도로부속교통안전시설물	100,000,000	100,000,000			0
		75,116,360		24,883,640
교통사고잦은곳 개선사업	14,347,050	14,347,050			0
		0	14,347,050
도로교통소통개선사업	35,164,330	35,164,330			0
		12,013,000		23,151,330

○ 예산과목

- 교통운영과, 교통안전시설물관리, 교통안전시설물유지관리, 도로부속교통안전시설물설치, 시설비 (100,000,000원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고잦은곳개선사업, 시설비 (14,347,050원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통개선사업, 시설비 (35,164,330원)

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 붙임 변경내역서와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 변경 설계내역서(제2차) 1부.   끝.