문서번호	기전과-1834
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기전과장	강서도로사업소장

2014년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가) 설계변경 (3차)계휙 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.02

강서도로사업소

(기전과)

2014년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

설계변경 (3차) 계획보고

『2014년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』에 대한 현재까지의 작업사항에 대하여 감리업체로부터 설계변경 서류가 제출되어 아래와 같이 검토보고합니다.

공사 개요

공 사 명 : 2014년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사 (연간단가)

공사기간 : 2014. 3. 20. ~ 2015. 2. 28.

도 급 액 : 88,000,000원

공사규모 : 교통안전표지 정비(신설 및 교체) 540(매·SET)

도 급 자 : (주)태양휀스 정 시 환

감 리 원 : (주)영호이앤씨 김 남 철

설계변경 사유

관련근거

- ㈜영호 본 2014-245(2015.02.09)호 설계변경 요청

서울시지방경찰청 교통안전시설 규제심의 결과와 각 관할경찰서,구청, 전자민원 및 기동점검 적출 등에 대한 표지 정비 작업지시에 의거 물량 증․감 발생 으로 인한 설계변경

주요 물량 증 ․ 감 내역

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
교통표지판 신설	매·SET	171	160	감) 11
교통표지판 교체	매·SET	312	332	증) 20
교통표지판 도장·보수	매·SET	6	7	증) 1
교통표지판 철거·제거·조정	매·SET	42	37	감) 5
교통표지판 이설	매·SET	4	4	-

공사비 변경내역

구 분		당 초	변 경	증감	비고
총공사비		88,000,000	88,000,000	-
도급비	공급가액	80,000,000	80,000,000	-
	부가가치세	8,000,000	8,000,000	-
	계	88,000,000	88,000,000	-

조치 계획

위 보고내용과 같이 작업시행한 결과 기존 설계물량이 증감되었기에 총계약금액(도급비) 범위내에서 조정하여 설계변경 시행하고 변경계약후  준공금 지급 및 준공처리 예정.

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 감리 기술검토의견서. 끝.