2014년 기능보강사업 계획변경 승인 검토 결과(노원구)

노원구 공릉종합사회복지관 기능보강사업 계획변경 요청

가. 요청사항

○ 사업명 : 1층 환경개선공사(출입문 교체, 장애인화장실 개보수)

(단위:천원)

사업내역	변경전				변경요청				비고
	계	시 비	구 비	자부담	계	시 비	구 비	자부담
사업비	22,530	15,771	6,759	-	22,530	15,771	6,759	-
사업내역	- 본관 출입문 교체(1) : 동일 - 본관 1층 장애인화장실 개보수 → 신관 1층 출입문 자동문 설치(2) → 본관 1층 복도□바닥 공사

나. 변경 요청 사유

- ’13년 4월 기능보강 신청 당시 본관 1층 화장실이 일반 화장실이었으나, ’13년 8월 노원구청 장애인지원과에서 장애인 전용 화장실 공사를 지원하여, 장애인 화장실 개□보수 공사가 전체 금액에서 제외됨

- 이에 신관 자동문 설치 금액 변경, 본관 복도□바닥 공사로 사업 변경 신청하게 되었으며, 자동문의 경우 최초 계획은 일반 자동문으로 하였으나, 공간 활용 및 비상시 안전 문제로 비상용 슬라이드 패닉 자동문으로 교체 요청

검토결과 : “일부 승인”

(단위:천원)

사업내역	변경전				변경후
	계	시 비	구 비	자부담	계	시 비	구 비	자부담
사업비	22,530	15,771	6,759	-	12,881 (△9,649)	9,017 (△6,754)	3,864 (△2,895)	-
사업내역	- 본관 출입문 교체(1) : 동일 - 본관 1층 장애인화장실 개보수 → 신관 1층 출입문 자동문 설치(2) : 승인 → 본관 1층 복도□바닥 공사 : 승인불가				- 출입문 교체(본관1, 신관2)

○ 본관 1층 복도□바닥 공사의 경우 본관의 출입구 복도는 지하층 경로식당 및 어르신들의 여러 프로그램실로 이어지는 구간으로 시설의 이용자가 많으나 현 상태는 양호하여 미지원 의견(2014년도 복지재단 타당성 검토 의견) : 승인 불가

○ 신관 슬라이드 패닉 자동문 설치 공사는 복지관 이용자의 편의성과 비상시의 위험 요인을 낮출 수 있어 타당함(복지재단 유선 검토) : 승인

- 전기로만 작동하는 일반 자동문과 달리 슬라이드 패닉 자동문은 화재 및 전력 차단 시 수동으로 개폐 가능하여 안전성 확보 가능