문서번호	공원운영과-2881
결재일자	2014.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
협 조

2014년 남산 및 산하공원

‘봄맞이 새단장의 날’ 추진계획

2014. 2

중부공원녹지사업소

공원운영과

남산 및 산하공원 ‘봄맞이 새단장의 날’ 추진계획

봄철을 맞아 남산 및 산하공원의 환경정비 및 봄꽃식재 등을 실시하여 공원을 찾는 많은 시민들에게 쾌적하고 깨끗한 공원환경을 제공하고자 함.

1				추 진 근 거

공원 ‘봄맞이 새단장의 날’ 추진계획 시달

공원녹지정책과-2078호(2014.2.10)

2				정 비 개 요

대 상 지 : 남산공원 등 6개소

정비기간 : 2014. 2. 17 ~ 3. 31

정비내용

공원 내 진입로, 광장 및 산책로 등 주요 지역에 겨울철 제설제로 찌든 때 제거

녹지대 공석 및 도로변 차단막 등 겨울잔재 제거

다중 시민들이 이용하는 화장실 청결유지, 음수대 가동점검(겨울철 3/15까지 중단) 및 환경정비

공원 내 주요 지역에 봄을 알리는 계절 꽃 식재로 시민 정서함양에 기여

퇴색 및 탈색된 벤치 등 공원시설 도색(목재는 투명 오일스텐으로 정비)

기타 공원 내 식재된 수목에 퇴비 등 유기질 거름 시비 및 수목 전정 실시

2				세 부 정 비 내 용

공원 「봄맞이 환경 정비의 날」 추진

기   간 : ‘14. 2. 17 ~ 3. 14(4주간)

“매주 수요일” 일제 환경 정비의 날 지정 추진

화장실, 의자, 수목 등 시설물 겨울철 묵은때 청소 등 일제 환경정비

공원 「봄맞이 꽃 심기의 날」 추진

기   간 : ‘14. 3. 3 ~ 3. 14(2주간)

3. 3일을 “봄맞이 꽃심기 날”로 정하여 꽃심기 시작

공원내 유휴공간에 봄꽃 식재하여 꽃동산 조성(덕은양묘장 꽃묘 적극 활용)

해빙기 공원시설 안전점검 및 정비

기   간 : ‘14. 3. 3 ~ 3. 31(4주간)

공원관리 시설물에 대한 해빙기 안전점검 및 정비 시행

토목, 건축, 전기 등 담당 분야별 안전 점검표에 의한 시설물 점검 및 정비

정비방법 : 공원별 인부 활용 자체정비

인부현황 ※ 2014.2.14 현재

구 분	계	남산	간데메	낙산	용산	중랑	훈련원	비고
계	136	78	7	13	16	15	7
공무직	43	23	4	4	5	6	1
기간제	14	0	0	1	0	0	0	‘13. 3월초 채용예정
공공근로	33	17	2	4	4	4	2
파견	59	38	1	4	7	5	4

일자별 작업계획

작업일자	내 용	비 고
2.17 ~ 3.2	시설물 묵은 때 청소 및 고장시설물 정비
3.3 ~ 3.7	공석(짚) 제거, 화장실 내·외부 대청소(20개소) 시설물 도색(의자, 파고라, 체육시설 등)
3.8 ~ 3.14	맥문동, 조릿대 등 묵은잎 제거, 퇴화식물 제거, 봄꽃식재	실적제출 (공원환경정비 및 봄꽃식재)
3.15 ~ 3.31	음수대 청소 및 가동(29개소), 배수로 낙엽제거 화장실 내·외부 2차 대청소, 시설물 청소

2				행 정 사 항

환경정비 추진사항 자체점검 : 2014.3.3 ~ 3.7

점검반 : 2개조 4명

- 남산공원(4개자락) : 공원운영팀 2명

- 산하공원(낙산 등 5개공원) : 산하공원별 교차점검

※ 낙산→용산, 용산→중랑, 중랑→낙산, 훈련원→간데메, 간데메→훈련원

점검내용 : 공원별 환경정비 대상발굴, 시민불편사항 점검

추진실적 수합·제출

공원별 추진실적(내용, 사진)을 작성하여 공원운영과에서 수합 후 제출

- 환경정비 및 봄꽃식재 : 2014.3.14수합 → 3.17제출(공원녹지정책과)

- 해빙기 공원시설 안전점검 : 2014.3.31수합 → 4. 1제출(공원녹지정책과)

※ 각 과별, 분야별, 북서울꿈의숲은 정비계획 별도 수립후 공원운영과에서 수합하여 실적 제출

첨부 : 실적보고(양식) 1부.  끝.