문서번호	도로보수과-1343
결재일자	2014.2.12.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
협조
	주무관

2014년 도로보수사업 추진계획

2014. 2.  .

서부도로사업소

[도로보수과]

2014년 도로보수사업 추진계획

아스팔트 포장도로 및 도로부속물, 교통안전시설물 등 도로보수과 소관사업에 대한 2014년도 세부 추진계획을 수립‧시행하여 안전하고 쾌적한 도로교통 환경을 시민들에게 제공하고자 함

□ 추진방향

〇 안전하고 쾌적한 도로교통환경 제공으로 대시민 행정서비스 향상

〇 철저한 품질관리 및 안전관리로 도로시설물 공용 수명 연장

〇 시민을 최우선 및 효율적 업무 추진으로 공사중 불편 최소화

□ 시설현황(도로보수분야)

〇 관리도로 : 총 71개 노선(연장 185.12km, 면적 4.102㎢)

〇 도로부속물 : 중앙분리대 등 7종

중앙분리대	방호울타리	미끄럼방지	충격흡수	과속방지	도로옹벽	방음벽
8,291m	1,622m	66,984㎡	150개소	17개소	1,848m	838m
(39개구간)	(11개소)	(57개소)			(15개소)	(4개소)

〇 교통안전부속물

시선유도표지	시선유도봉	갈매기표지	도로반사경	무단횡단방지
327개	2,406개 [도로:1,488 시설: 918]	271개	22개소	7,643m

〇 노면표시 : 총 2,502km

차선	횡단보도	문자	방향	횡단예고	안전지대	표지병(개)
1,338km	726km	230km	128km	33km	47km	26,168개
	(2,710개소)	(28,778개소)	(13,942개소)	(2,379개소)	(1,480개소)

〇 중앙버스전용차로 : 6개 축(9개 노선), 34.8km

노선명	구간	연장(km)	정류장(개소)	개통년도	비 고
계	6개 축	34.8	92
삼일로	퇴계로∼청계천	0.9	4	2004
수색‧성산로	고양시계∼이대후문	6.8	25	2004
한강로	한강대교∼서울역	5.5	10	2006
마포로	마포대교∼아현삼거리	5.3	8	2006
양화‧신촌로	양화대교∼이대역	5.2	10	2009
통일‧의주로	고양시계∼서소문	11.1	35	'09 ~'11

□ 2014년 사업예산 확보현황 : 10건 11,731백만원

구분	사 업 명	일반․ 연간단가	사업규모(안)	예산현액 (백만원)	담당자	비고
1	노후포장도로정비공사	일반공사	2,300a 정비	6,200	시설7 우창원	미배정
2	포장도로긴급복구공사	연간단가	270a 정비	1,500	시설7 우창원
3	불량맨홀정비공사	연간단가	600개소정비	600	시설6 이상하	미배정
4	중앙차로정비공사	일반공사	40a 정비	210	시설7 우창원	미배정
5	도로굴착복구공사	연간단가	280a 정비	1,200	시설7 최정필
6	도로부속시설 일상유지보수	연간단가	도로부속물 유지보수	330	시설6 김영용
7	방호울타리 및 중앙분리대정비공사	일반공사	등급개선360m	277	시설6 김영용
8	노면표시유지보수공사	연간단가	150㎞ 도색	667	시설8 권미애	미배정
9	교통안전 부속시설물 유지보수	연간단가	교통안전부속물 유지보수	100	시설8 권미애	미배정
10	도로굴착복구 및 포장공사 감리용역	검측감리 용역	굴착복구 및 포장도로검측 감리 수행	647	시설7 최정필	미배정

□ 사업별 발주 및 추진계획

<노후포장도로정비공사>

〇 기본방향

- 정비대상은 도로관리과와 합동 조사결과에 따라 예산상황에 맞추어 결정

- 노후포장도로정비공사와 긴급복구공사(연간단가)로 분리하여 발주

․친환경 포장(재생, 개질 등)은 정비공사에 포함하되,

재생아스콘 포장은 2014년도 의무 사용량(35%) 이상 사용

․균열보수, 박층포장 등 예방적 보수는 대상물량이 유동적이므로 본청 방침에 따라 시행여부 및 방법 결정

․중앙버스전용차로 등 중차량 통행 빈번 지역은 소성변형 및 균열저항성이 우수한 개질아스팔트 사용

- 폐기물처리용역 및 노면표시(공사)는 노후포장도로정비공사와 포장도로 긴급복구공사(연간단가)를 통합하여 시행

〇 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	본공사	폐기물처리	노면표시	비 고
합 계	8,510	7,140	850	520
노후포장도로정비공사 (중앙버스전용차로 포함)	6,410	5,260	700	450	미배정 및 직영재료비 포함
긴급복구공사(연간단가)	1,500	1,300	130	70
불량맨홀정비공사(연간단가)	600	580	20		미배정

※ 개략 산출금액이며, 설계결과에 따라 다소 차이가 있음.

미배정된 노후포장도로정비공사 예산 배정결과에 따라 발주 설계시행

〇 사업개요 및 추진일정

- 정비대상 : 기 조사 보고한 20개 노선(92개소)에 대하여 현장상황과 예산 사정을 고려하여 정비

- 추진일정

․'14. 02. : 계약심사 및 발주

․'14. 03. : 공사 계약 및 착공

․'14. 04. ∼ '14. 12. : 공사시행

※유지관리과정 도로파손, 응급사항 등 현장상황에 따라 정비 우선순위 결정

<불량맨홀정비공사>

〇 기본방향

- 재배정 예산에 맞추어 발주하고, 연간단가계약으로 시행

- 정비대상은 자체 불량맨홀 조사결과에 대하여 맨홀관리기관과 사전 협의후 예산사정을 고려하여 정비대상 확정

- ‘13년도 전수조사시 불량한 맨홀을 포함정비하고 기관별 자체보수가 가능한 기관 및 유관기관 불량맨홀은 제외 시행

〇 소요예산 : 600백만원

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 불량맨홀 정비 약 600개(안)

- 추진일정

․'14. 02. : 대상물량조사

․'14. 03. : 계약심사 및 공사발주

․'14. 04. : 공사 계약 및 착공

․'14. 04 ∼ '15. 2. : 공사 시행

<도로굴착복구공사>

〇 기본방향

- 포장도로 10계명 등 굴착복구포장 품질관리 향상 및 하자관리를 위하여  부득이한 경우를 제외하고 『관리청복구 시행 원칙』

- 재배정 예산에 맞추어 발주하고, 연간단가계약으로 시행

- 도로굴착복구 승인기관(자치구)의 관리청 복구 의뢰시 도급자에게 작업지시후 실 복구량 기준 정산

- 도로유지관리 측면을 고려하여 가급적 차로단위 복구 시행

․굴착복구 승인전 협의단계에 승인기관과 긴밀히 협의

- 폐기물처리용역은 굴착복구공사 건으로 별도 발주

- 노면표시는 소량임을 감안 노면표시유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행하고 굴착복구기금으로 별도 정산 지출토록함.

〇 소요예산(굴착기금)

(단위 : 백만원)

계	본공사	폐기물처리	노면표시
1,200	1,100	50	50

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 직접복구 80a, 차로단위 복구 200a

- 추진일정

․'14. 02. : 계약심사 및 발주

․'14. 03. : 공사 계약 및 착공

․'14. 04. ∼ '15. 2. : 공사 시행

<도로부속시설물 일상유지보수공사>

〇 기본방향

- 재배정 예산에 맞추어 발주하고, 연간단가계약으로 시행

- 신규 시설물 설치는 가급적 지양하고, 기존 시설물 유지관리 정비 위주 시행

- 유지관리과정 긴급사항 발생시 우선 작업지시

․도시미관 확보를 위하여 주요 시설에 대하여 봄, 가을 세척 실시

․지난해 발생한 민원 중 예산 부족으로 처리하지 못한 사항 우선 시행

〇 소요예산 : 490백만원

- 도로부속시설물 일상유지관리   : 330백만원

- 방호울타리 및  중앙분리대정비 : 160백만원

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 도로부속물 유지관리를 위한 단가계약임을 감안하여 관리 시설물 설치 및 보수 공종 반영

․시설물 세척, 옹벽보수, 방호울타리 정비, 충격흡수시설 등 보수

- 추진일정

․'14. 02. : 공사 발주

․'14. 03. : 공사 계약 및 착공

․'14. 03. ∼ '15. 02. : 공사 시행

<방호울타리설치공사>

〇 기본방향

- 도로관리과 계획에 따라 기존 시설 등급개량(SB 3등급이상) 시행

〇 소요예산 : 117백만원

〇 사업개요 및 추진일정

위   치 : 한강대교북단 로타리(대건로)

- 규   모 : 방호울타리 360m

- 추진일정

․'14. 02. : 공사 발주

․'14. 03. : 공사 계약 및 착공

․'14. 03. ～ 07. : 등급 개량 시행

<노면표시 유지보수공사>

〇 기본방향

- 재배정 예산에 맞추어 발주하고, 연간단가계약으로 시행

- 경찰청 규제사항 및 긴급사항 발생시 우선 작업지시

․지난해 발생한 민원 중 예산 부족으로 처리하지 못한 사항 우선 시행

- 예산부족 실정을 감안, 도로표지병 설치는 가급적 지양

〇 소요예산 : 667백만원(예정)

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 차선 도색 및 제거 약 150km

- 추진일정

․'14. 02. : 계약심사 및 공사 발주

․'14. 03. : 공사 계약 및 착공

․'14. 03. ∼ '15. 02. : 공사 시행

<교통안전부속시설물 유지보수공사>

〇 기본방향

- 재배정 예산에 맞추어 발주하고, 연간단가계약으로 시행

- 신규 시설물 설치 지양, 기존 시설 유지관리 정비 위주 시행

․지난해 발생한 민원 중 예산 부족으로 처리하지 못한 사항 우선 시행

〇 소요예산 : 100백만원(예정)

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 교통안전부속물 유지관리를 위한 단가계약임을 감안하여 관리시설물 설치 및 보수 공종 반영

․시설물 세척, 무단횡단방지시설 정비, 시선유도봉 교체 및 보수 등

- 추진일정

․'14. 02. : 공사 발주

․'14. 03. : 공사 계약 및 착공

․'14. 03. ∼ '15. 02. : 공사 시행

<도로굴착복구 및 포장도로정비공사 감리용역(강북권역)>

〇 기본방향

- 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비 공사시 공사장 품질관리 향상을 위하여 검측감리원을 현장에 투입 등 용역수행

- 서부, 북부, 성동도로사업소의 검측감리원을 서부도로사업소에서 총괄 발주 및 계약을 시행하여 도로굴착복구 및 노후포장도로정비공사 착공시 현장 투입

※「도로굴착복구 감독업무 개선계획」 행정2부시장 방침 제206호 및 「14년도   노후포장도로 정비기준 개선 검토보고」와 관련임.

〇 소요예산 : 647백만원

〇 사업개요 및 추진일정

- 개  요 : 시행방식은 검측감리용역 수행

- 기  간 : 착수후 약 9개월간

감리원 : 총 8명

▪총괄감리원(감리사) : 1명(서부)

▪검측감리원 : 굴착 → 3명(서부, 북부, 성동)

포장 → 3명(서부, 북부, 성동)

▪플랜트점검 및 총괄감리원 보고 : 1명(서부, 북부, 성동)

- 추진일정

․'14. 02. : 예산배정(도로굴착복구기금 및 일반예산)

발주의뢰(시 재무과)

입찰공고 및 사업수행능력평가서제출

․'14. 03. : 사업수행능력평가, 낙찰자 선정 및 계약, 용역착수

․'14. 03. ～ 11. : 용역수행

□ 행정사항

〇 공사발주후 시 재무과에 입찰공고 및 계약의뢰