문서번호	누수방지과-9191
결재일자	2013.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장
협 조

2014년 배급수관 및 불용관 정비사업 추진계획

2013. 12.

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 배급수관 및 불용관 정비사업 추진계획

’14년도 배급수관 및 불용관 정비사업에 대하여 사업소별로 정비목표를 정하고 사전 설계, 심사등을 실시하여 사업추진에 내실화를 기하고자 함.

□ 사업근거

○ 누수방지과-1177(’06.08.10) : 세척갱생관로 정비사업 추진계획

○ 누수방지과-1609(’06.08.11) : 취약지역 유수율 증대사업 추진

○ 누수방지과-9138(’13.12.17) : 배급수관(세척갱생관) 정비사업 계획변경

□ 사업개요

○ 대    상 : 689㎞(D=80~350㎜)

- 세척갱생관 628㎞, 흑PE관 61㎞

○ 사 업 비 : 4,736억원(세척갱생관 4,464억원, 흑PE관 272억원)

○ 사업기간 : ’06년 ~ ’18년

○ 연차별 정비실적 및 계획

(단위 : ㎞.억원)

구 분		목 표	정비실적 (’06~’13)	연차별 계획
				소계	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
계	연 장	689	264	425	39	67	73	101	145
	사업비	4,736	1,666.26	3,069.74	282.1	519	539	734	995.64
세척 갱생관	연 장	628	212	416	30	67	73	101	145
	사업비	4,464	1,429.76	3,034.24	246.6	519	539	734	995.64
흑PE관	연 장	61	52	9	9	-	-	-	-
	사업비	272	236.5	35.5	35.5	-	-	-	-

※ 투자계획에 의거 흑PE관 정비 ’14년도에 완료

<’14년 추진계획>

□ 배급수관 정비사업

○ 정비대상 : 39㎞(세척갱생관 30㎞, 흑PE관 9㎞)

○ 총사업비 : 28,210백만원(세척갱생관 24,660백만원, 흑PE관 3,550백만원)

○ 사업기간 : ’14.3 ~ 11월

○ 추진내용

- 3회이상 누수다발관 우선 정비(상수도관 누수 대응능력 강화계획, 부시장방침 제100호)

▸ 회주철갱생 17개소 구간은 전량 교체

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- 고도정수 처리시설이 완료된 지역을 타 지역에 비하여 정비순위 조정

- 사업은 단위사업별 발주를 원칙으로 함

○ 사업소별 정비대상

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합계	정비대상 (㎞)	39	6.63	8.28	4.9	2.6	3.3	5.87	4.34	3.08
	사업비 (백만원)	26,662	4,932	4,563	3,749	1,989	2,555	3,724	2,823	2,327
세척 갱생관	정비대상 (㎞)	30	5.9	3.5	4.9	2.6	3.3	3.8	3.0	3.0
	사업비 (백만원)	23,112	4,644	2,678	3,749	1,989	2,555	2,907	2,295	2,295
흑 PE관	정비대상 (㎞)	9	0.73	4.78	-	-	-	2.07	1.34	0.08
	사업비 (백만원)	3,550	288	1,885	-	-	-	817	528	32

- 사업비 중 감리비 1,540백만원, 부대비 8백만원은 미포함 됨

- ’14년 유수율 향상 특화사업비 반영(160백만원) : 세척갱생관 정비사업비에 포함

▸ 중부(130백만원) : 감압밸브 4개소 및 경계밸브 10개소

▸ 강서(30백만원)  : 감압밸브 2개소

○ ’13년도 정비실적

- 세척갱생관 : 29㎞(목표 27㎞ 대비 107%)

- 흑PE관    : 3㎞(목표 3㎞ 대비 100%)

□ 불용관 정비사업

○ 정비대상 : 11㎞

○ 총사업비 : 7,500백만원

○ 사업기간 : ’14.1 ~ 12월

○ 추진내용

- 발생되는 불용관에 대하여는 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄 조치

- 분기점 폐쇄가 어려운 80㎜이상에 대하여는 퇴수시설을 만드는 등 사수지역을 최소화

○ 사업소별 정비대상 : 사업소별 배·급수관 길이를 기준으로 물량 산정

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비대상(㎞)	11	3.7	1.2	1.4	0.7	1.1	1.5	0.8	0.6
사업비(백만원)	6,900	2,320	756	878	439	690	940	501	376

- 사업비 중 감리비 600백만원은 미포함 됨

- ’14년 유수율 향상 특화사업비 반영(1,000백만원)

▸ 중부(1,000백만원) : 종로구 창신동 22-3번지 외 65건(2.5㎞)

<사업계획 심사 및 향후 추진일정>

□ 사업계획 심사

○ 심사대상 : 세척갱생관, 흑PE관 정비사업

○ 심사기간 : ’13. 12. 26. ~ 12. 30

○ 심사내용

- 3회이상 누수 다발관 사업 반영여부

- 단절관 및 관말지역 순환배관망 정비 선정여부

- 고도정수 처리시설이 완료된 지역 반영여부

- 기타 사업계획의 적정성 등

○ 심사방법 : 사업소의 정비계획을 서면 심사

○ 사업계획서 심사 자료

- 단위사업별 계획서 2부 : 구간별로 선정사유 상세히 기재

- 1/3000 GIS 도면(규격 A3)

▸ 재질, 구경, 부설연도 등 표시 - 오기된 내용은 수정

▸ 소블록 경계표시, 블록명 표기(적색)

▸ 재개발, 뉴타운 지역 표시(주황색)

▸ 정비대상은 GIS도면 위에 트레이싱지를 붙여 표시 및 관경표기(적색)

(3회 이상 누수다발관 파란색 표기 – 산재된 경우 별도 리스트 제출)

▸ 철거율이 75%이상 되도록 철거폐쇄 계획수립

□ 향후 추진일정

○ ’13.12.18 : 배급수관 정비사업 추진계획 수립 및 사업계획심사일정 통보

○ ’13.12.31 : 사업소별 사업계획 심사결과 및 설계도서 심사일정 통보

○ ’14.01.20 : 예산배정(각 사업소별 일괄배정)

○ ’14.01.20 : 일위대가표 작성 완료(재무회계과)

○ ’14.01.27 ~ 02.10 : 계약심의(본청 계약심사과)

○ ’14.02.06 ~ 02.14 : 발주

○ ’14.02.13 ~ 02.24 : 계약

○ ’14.03.03 : 착공

□ 행정사항

○ 첨부양식에 의거 ’13.12.24일까지 ’14년 배급수관정비사업 추진

계획보고

따로붙임 : 보고양식 1부.   끝.