문서번호	수도자재관리센터-2787
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공사자재관리팀장		소장
협 조
	행정관리팀장

2014년 상수도

공사용 자재수급 및 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02

수도자재관리센터

2014년 상수도 공사용자재 수급 및 구매 계획

2014년 상수도 공사에 소요되는 자재를 안정적으로 공급하여

원활한 공사 시행을 도모하기 위함

1		자재 수급관리 개요

○ 근    거 : 서울특별시 수도자재관리규칙 제5조 제2항

○ 대상자재 : 본부 및 수도사업소 상수도공사용 관급자재

-  공사용 자재 : 직관류(주철관,강관,이형관), 수도계량기보호통, 밸브류,

이탈방지압륜, 철개류, 소화전, 재생아스콘 등

○ 자재수급절차

공사부서	⇒ 요 구	수도자재관리센터	⇔ 출 고 반 납	공사 현장
․ 공사설계 ․ 구매요구		․ 구매 및 입 ․ 출고 관리 ․ 검사 및 검수		․ 자재 사용 ․ 자재 반납

※자재 전산관리시스템에 의거 운영

○ 자재적재장 운영

-  노량진 청사

▷ 야적 적치장(13,000㎡) : 주철관류, 이형관류, 철개류, 계량기보호통

▷ 자재 창고   (1,385㎡) : 밸브류, 팩킹류, 볼트류

-  강북아리수정수센터(1,720 ㎡) : 누수복구 비축자재(강관류)

2		2014년 자재구매 계획

○ 구매 기준

- 본부 자재선정위원회에서 선정된 자재 및 시방서에 의해 구매

- 공사부서의 공사자재 구매요구량을 공사시기, 재고량, 납품기한을

고려하여 구매 시기를 탄력적 조정

- 성수기의 원활한 자재 공급을 위하여 사용빈도에 따라 전년 사용량         의 10 ~ 30% 정도를 저장자재로 사전 확보

- 2015년 상반기 공사시행을 대비 예산범위내에서 저장자재 확보

- 수요부서에서 요구하는 우수제품 구매

구 분		합 계 (점)	직관류 (본)	이형관 (개)	밸브류 (개)	이탈방지압륜 (조)	철개류 (조)	계량기 보호통 (조)	재생 아스콘 (톤)
합 계	수 량	128,990	9,209	31,984	7,225	28,713	6,011	17,048	28,800
	금 액 (백만원)	22,000	7,100	3,500	3,700	2,000	2,400	2,200	1,100

○ 자재구매 계획량 (추정치 : 22,000 백만원)

○ 최근 3년간 자재구매 추이

- 연도별 자재구매량 감소 원인

▷ 연차적 사업인 상수도 불용관 정비가 거의 완료 되어 사업규모 축소로          주철관 사용량 감소

▷ 강관류는 배수지 및 취수장 이전 관로공사 완료로 소요량 감소

▷ 이형관류는 관급전환하여 ‘12년 하반기부터 전량 사용

▷ ‘12년 양회류 수급방법 개선으로 재생아스콘 품목만 통합구매

○ 구매 대상

- 조달구매 : 주철관류, 발브류, 계량기보호통 등

- 일반구매 : 강관류, 엑폭시분체 주철관, 재생아스콘 등

▷조달 미등록 물품으로 본청 계약심사 및 구매

※ 2013년 구매 비율 : 조달구매 80.4%, 일반구매 19.6%

○ 자재 납품검사

- 검사기준 : KS 규정, 구매시방서에 의함

- 대상자재 : 직관류, 밸브류, 철개류, 계량기보호통 등

▷ 공장검사(품질검사) : 규격검사, 기계적시험, 성능 ․ 수압시험 등

▷입고 검사(납품검사) : 육안검사 및 시험성적서 적합 여부 확인

- 시험성적서 제출

▷ 기계적성질, 화학성분검사, 구상화율 등 자체 ․ 공인기관 시험성적서 제출

- 출장검사 간소화

▷ 조달청, 소방검정공사 등 검사를 받은 제품은 공장검사를 생략

▷ 전년도 검사에 불합격이 없는 제품은 공장검사 일부 생략

▷ 긴급자재 확보, 소량구매 시는 제작사 자체시험성적서로 대체

3		조기공사에 따른 자재 수급관리

○ 자재수급 여건

- 2014년 조기공사 발주로 3월부터 상수도 공사가 시행할 예정이며

- 공사에 따른 자재 수요가 4 ~ 6월 및 9 ~ 10월에 집중이 예상 됨

○ 자재확보 및 자재적재 방안

- 전반기 자재구매 : 연간 자재구매량 60% 확보

▷ 최근 3년간 공사용자재 평균 출고율

구분		주철관	밸브류	압륜류	이형관류
최근 3년 평균 출고률	2분기	53.4%	40.7%	45.8%	49.6%
	전반기	58.5%	55.5%	54.9%	53.0%

※ 자재 구매량 : 출고자재 + 저장자재(출고 여유자재)

- 공급 차질 우려 품목 집중관리 및 제작사와 협조체제 유지

▷ 주철관류, 주철 이형관류, 밸브류 등

- 각 수도사업소 최소 30일 이전 자재구매 요구

- 자재적재 방안

▷ 직관류, 철개류, 계량기보호통 등은 자재의 모양의 특성에

따라서 다단으로 효율적인 적재하며

▷ 이형관류의 형태에 따라 파렛트를 이용해 2~4단 적재

4		효율적인 재고관리 및 안전교육 ․ 점검

○ 재고자재 유지관리

- 재고조사

▷ 전산 재고량과 현장 재고량을 일치 여부 조사

▷ 재고량 일치 되지 않을 경우 원인분석 후 조치

- 정비의 날 운영

▷ 매월 마지막주 금요일 정비의 날 운영

▷ 경미한 도색 및 정비는 자체에서 시행하고

▷ 자체에서 곤란한 정비는 외주 시행

- 장기 미사용 자재 조기소진 및 예방

▷ 먼저 입고된 자재부터 우선하여 출고

▷ 장기재고 발생이 예상되는 자재는 유사기능 자재로 재고전환,              개조, 교환 등으로 소진

▷ 사용빈도가 적은 자재는 공사부서와 재협의 후 구매

○ 안전관리 교육 및 점검

- 자재의 적재, 입 ․ 출고 등 안전관리 강화

- 작업 및 자재적재 상태 등 안전여부 점검

- 장비운영, 자재적재 상태 등 안전교육 실시

5		행정 사항

○ 본부 공사주무부서 및 사업소 공사부서에 자재구매계획서 통보

○ 각 수도사업소에 최소 30일전 사용자재 구매 요구

붙임 1. 2014년 자재구매 산출서 1부.

2. 2014.01.01. 자재재고 현황 1부. 끝.