문서번호	물환경연구부-1645
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
협 조
	연구지원부장
	주무관

2014년 수질자동측정망 시설점검 결과에 따른 노후시설 보수 계획

2014. 4

물환경연구부

[물환경생태팀]

2014년도 수질자동측정망 시설점검 결과에 따른

노후시설 보수 계획

수질 모니터링에 의한 수질오염사고 예방 및 시설물 안전한 유지관리에 의한 안전사고를 예방하기 위하여 수질자동측정망 시설물을 점검하고 그에 따른 노후시설 보수 및 수질측정환경 개선을 실시하고자 함

Ⅰ

법 적 근 거

환경정책기본법 제15조(환경오염의 조사․평가 등)

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제9조(상시측정)

Ⅱ

시행 절차

계획 수립

시설점검  실시

보수 계획 수립

시설 보완

Ⅲ

시설 점검

시행일시

2014. 4. 7.(월) ∼ 2014. 4. 8.(화) (2일간)

점검자

물환경생태팀장 , 임귀철, 이광식, 윤태호

대상시설

번호	측정소명	측정소 위치	설치연도	측정항목
1	안양천	구로구 구로동 683-11 (신구로 빗물펌프장내)	1993	Temp, pH, DO, Cond, SS, T-N, T-P, CN, Phenol, TOC, ABS, Turbidity, Hg, 자동채수기
2	탄 천	송파구 가락동 509번지 (탄천 빗물펌프장 내)	1993 개축(2010)	Temp, pH, DO, Cond,SS, T-N, T-P, CN, TOC, Hg, ABS, Turbidity, Phenol, 자동채수기
3	중랑천	중랑구휘경2동 7 – 17번지 (휘경 빗물펌프장 내)	1994	Temp, pH, DO, Cond, SS, COD, T-N, T-P, CN, Phenol, Hg, ABS, TOC, 생물독성경보장치, 자동채수기
4	행 주	고양시덕양구 행주외동 28-8 (농업기반공사고양지부펌프장)	1999	Temp, pH, DO, Cond, SS, T-N, T-P, CN, TOC,TOD, Phenol, ABS, Chlorophyll a, Turbidity, Cl-, Hg
5	노량진	노량진본동 5-2번지 (구 취수장 내)	1975 개축(2002)	Temp, pH, DO, Cond, SS, T-N, T-P, CN,Phenol, TOC, TOD, VOC, Turbidity, ABS, Chlorophyll-a, 생물독성경보장치
6	선 유	양화동95번지 (선유도공원 내)	1975 이전신축(2005)	Temp, pH, DO, Cond, SS, COD, T-N, T-P, CN, Phenol, ABS, TOC Chlorophyll-a.Turbidity, 생물독성경보장치

점검 결과

번호	측정소명	점검내역	상태	점검일	비고
1	중랑천	건물내·외부 및 취수시설	하 상 불 량 에어컨,수조탱크불량	4월7일	보수 필요
2	탄 천	건물내·외부 및 취수시설	하 상 불 량 외벽벽면파손,천장 누수,수조탱크불량	4월7일	보수 필요
3	안양천	건물내·외부 및 취수시설	하 상 불 량 지붕개보수	4월7일	보수 필요
4	선 유	건물내·외부 및 취수시설	외부계단불량,출입문불량	4월8일	보수 필요
5	노량진	건물내·외부 및 취수시설	내·외벽 불량 수중모터계단불량, 내부칠불량,지붕불량	4월8일	보수 필요
6	행 주	건물내·외부 및 취수시설	정상	4월7일

Ⅳ

보수 계획

사업 개요

수질자동측정망 6개소 중 5개소의 노후시설 보수공사

취수관로 정비, 하천 수중펌프 주변 하상정리 공사실시

보수 계획

(단위 : 천원)

번호	공사내역	소요예산	예산과목	일정	비고
		44,550
1	수질자동측정소 외부계단식층계 공사	11,000	수질‧토양 오염물질검사	5월	선유,노량진
2	수질자동측정소 하상정비공사	7,000	수질‧토양 오염물질검사	6월	안양천, 탄천, 중랑천
3	수질자동측정소 외벽벽면 및 지붕보수공사	14,000	수질‧토양 오염물질검사	6월	탄천,안양천
4	수질자동측정소 내 ,외벽공사	12,550	수질‧토양 오염물질검사	9월	노량진

소요예산

소요예산 : 금44,550천원

예산과목

- 보건환경연구원효율적운영, 수질·토양오염물질검사, 시설비(수질자동측정망공사비)

기대효과

수질측정소의 내부 및 외관 정비를 통한 측정 환경을 개선하여 수질측정에 따른 안전사고 예방

취수지점 하상정리 등으로 원활한 수질시료 채취 등 적정한 수질측정환경을 조성하여 수질측정자료의 신뢰성을 확보하고 수질 오염 사고에 대비

수질측정소 시설보수로 수질측정소의 대시민 이미지 제고와 수질모니터링 시책 홍보

Ⅴ

행정사항

점검 결과를 분석하여 문제점을 도출하고 그 특성에 맞는 대책을 마련하여 보수

계획 수립 및 추진. 끝.