문서번호	조경과-462
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
협 조	녹색에너지과장
	학교지원과장

2014년 에코스쿨 조성사업 추진계획

2014. 1.

푸른도시국

(조  경  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	시민참여 사업 전개	)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □
				유 □				(
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(	해당자치구 및 서울시교육청 등	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

2014년 에코스쿨 조성사업 추진계획

도심 생활권내 고르게 분포하고 있는 학교운동장을 중심으로 다양한 녹화기법을 적용 풍부한 녹지와 생태공간을 조성하는 에코스쿨을 조성하여 자연친화적 교육환경 제공과 쾌적한 지역 커뮤니티 장소를 제공코자 함.

Ⅰ				추 진 근 거

제35대 시장 공약사업 『10분 거리 동네공원 조성』

‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인 추진계획 (시장방침 제69호,’13.3.21)

Ⅱ				추 진 목 표

기존 학교공원화사업을 업그레이드하여 자연친화적 복합녹화 추진

운동장 주변 녹화, 옥상녹화, 벽면녹화, 빗물이용시설 등 다양한 녹화기법 활용

자연친화적 교육환경조성 및 지역의 생태거점공원화 추진

학생들 스스로가 꽃과 나무로 녹화활동을 직접 체험할 수 있는 토대 제공

서울시교육청 등 관련기관과 협의체계 구축으로 시너지 배가

Ⅲ				사 업 개 요

대    상 : 서울시 초 ․ 중 ․ 고교 대상

규    모 : 구역통합형 에코스쿨존 2개 지역, 에코스쿨 38개교 이상

사업기간 : 2013 ~ 2015(계속)

사업내용 : 구역통합형 에코스쿨존 및 에코스쿨 조성

사 업 비 : 8,000백만원 (’13년 이전 3,015, 14년 2,118, 15년 이후  2,867)

추진실적

연도	구 분	위 치	조성면적 (㎡)	사 업 비 (백만원)	비고
계		총 20개소	20,582	3,037
2013	에코스쿨 존	동대문구(숭인중학교, 신답초등학교) 구 로 구(구로고, 신구로초교, 영림중교)	15,000	1,735
	에코스쿨	중구 창덕여자중학교 등 18개교	5,582	1,302

Ⅳ				2014년 사업계획

대    상 : 중구 광희초등학교 등 19개교

면    적 : 17,494㎡

사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

사업내용 : 에코스쿨 조성 등

- 유휴공지 녹화, 옥상녹화(태양광발전), 벽면녹화, 텃밭(자연학습장) 조성  등

사 업 비 : 2,118백만원

예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활 주변 녹지확충 및 시민참여 활성화, 에코스쿨 조성, 자치단체자본보조

Ⅴ				세부 추진방향

학교․ 지역공동체의 적극 참여로 내실 있는 에코스쿨 조성사업 추진

- 설계 등 계획과정부터 학교공동체(학생, 학부모, 교직원, 운영위원회 등) 및 지역공동체(지역주민, 시․구의원 등)의 실질적인 참여 추진

- 학교별 「에코스쿨추진위원회」를 구성하여 의견 수렴 및 설계․사후관리에 적극 참여

- 에코스쿨추진위원회를 통해 자체 워크숍 개최 및 설계안 구상 등 에코스쿨조성사업에 적극 동참

에코스쿨추진위원회

▷ 설계 및 시공과정에 학교공동체와 지역주민이

다양하게 참여할 수 있도록 분위기 조성

▷ 에코스쿨조성관련 전담교사 선임하고 교직원, 학생,

운영위원회, 학부모 등 공동참여

▷ 자체 워크숍 개최 및 설계안 구상 등

학교교육 및 안전에 지장이 없는 범위내 학교를 활용하여 지역생태거점 마련

- 담장철거 후 생울타리 조성은 학생 안전을 최우선으로 고려 신중히 시행

- 에코스쿨조성 후 학교를 활용하여 지역 주민들의 커뮤니티 공간으로 제공

학생들의 교육프로그램으로 연계

- 특별활동 시간 등을 활용하여 나무를 심고 가꾸며 교육할 수 있는 생활 환경교육 프로그램화

- 설계 시 교육적 측면을 고려한 수종(초종) 선택 및 배식

- 자체 또는 외부전문가를 초빙하여 학교숲 해설 및 자연보호, 산불조심 홍보 등 교육프로그램 운영

공동유지 관리체계 마련, 관리수준 향상 ⇨ 협정서 체결

- 자치구와 학교간 협정서 체결 및 체계적인 유지관리체계 마련

- 에코스쿨조성사업 완료 후 녹지대 청소, 환경정비, 물주기 등 일상적인 관리는 학교에서 주관 시행

- 병충해 방제, 고사목 제거, 비료주기, 노후 시설물 보수정비 등 전문적인 관리지원은 자치구 지원

- 학교별 설계 시 빗물유입 화단 및 빗물이용시설 등 적극 검토․도입

※ 민자유치 햇빛발전소 설치사업(태양광발전 시설 설치 등) 참여는 기후환경본부(녹색에너지과)와 협력하여 별도 추진하되, 저용량(5㎾ 내외)인 경우 발주처에서 대상학교와 협의 후 자체 시행 여부 결정 및 추진

Ⅵ				추 진 일 정

2014.  1월          : 사업계획 수립 및 시달

2014.  1월 ~  4월 : 기술용역타당성심사, 실시설계용역, 주민설명회

2014.  4월 ~  5월 : 설계심의, 계약심사

2014.  5월 ~ 11월 : 공사발주 및 공사시행

2014. 12월         : 공사준공

Ⅶ				사 업 효 과

토지보상 없이 생활권내 거점 공원 확보

자연친화적 교육환경조성 및 도심내 부족한 녹지 확충

학교공동체, 지역공동체의 커뮤니티 및 소통 공간 제공

Ⅷ				행 정 사 항

기술용역 자체설계를 실시하는 자치구는 도면작성비용 지급 및 기술용역 시행이 필요한 자치구는 설계용역기술용역 타당성심사 후 설계비 지급

학교별 에코스쿨추진위원회(지역 주민 50％ 이상) 구성 및 운영

- 설계안 구상 등 의견 수렴 및 시공․사후관리에 참여

기본 구상안 확정 후 상세 실시설계 이전에 시 조경과 설계심의 요청

조경과 설계심의 및 계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 조정 배정

공사 시 공사안내판 사전 설치 및 보행자 유도조치 등 안전 시행

사업 착공 및 준공보고 철저

붙 임 : 1. 2014년 사업 대상지 및 사업비 가내시내역 1부.

2. 에코스쿨 협약서(안) 1부.

3. 착공(준공)보고 서식 1부.