2014년 작은도서관 조성 사업계획 변경신청서

1. 사업개요

ㅇ 지자체명 : 서울특별시 동작구

ㅇ 조성공간 : 서울특별시 상도4동 산65-149(국사봉 행복유치원 뒤편)

ㅇ 주    소 : 서울특별시 상도4동 산65-149

ㅇ 도서관명 : 국사봉 숲속 작은도서관

ㅇ 사업유형 : 생활밀착형

ㅇ 사업기간 : 2015년 3월 ～ 2015년 11월 [변경]

ㅇ 규    모 : 100㎡(열람실 36㎡, 외부공간 64㎡)

ㅇ 운영주체 : 동작구청 공원녹지과

ㅇ 특    징

- 도시의 취학전 어린이들이 숲속에서 책과 더불어 놀이를 통하여      자연속에서 배우며 성장할 수 있는 공간으로,

- 아이들에게는 가정적 분위기에서 안전하게 배우는 공간으로, 부모와  주민들에게는 이웃과 소통 공간 및 마을 사랑방으로 기능

- 설계단계부터 시공까지 지역 자생단체(벚뜰-국사봉 도서관을 사랑하는  사람들의 모임)와 함께 조성

2. 조성 후 운영계획

ㅇ 조성 이후 지자체의 운영예산 지원계획  (단위 : 백만원)

연도	′16	′17	′18	′19	′20	총계
예산	5	7	7	7	7	33

ㅇ 운영 및 활동계획

- 운영방법 : 민간위탁

- 운영인력 : 총 16명

- 운영시간 : 월 ~ 토(10:00 ~ 18:00), 일요일 및 법정공휴일 휴무

- 비치도서 ‧ 물자 : PC 1set, 책장(4개),도서(1,300권), 열람테이블(4개) 등

- 운영프로그램 : 초등학생 아이들의 숲속공간, 엄마들의 책읽기 모임, 부모교육 강좌, 놀이강좌, 생태나들이, 노래하는 도서관, 할아버지는 선생님 등

- 주민참여 촉진을 위한 홍보전략 등

▪지역커뮤니티 및 SNS 활용

▪인근 유치원 · 초등학교 이용안내 협조

3. 예산계획

ㅇ 총괄표

(단위 : 천원)

계	국비	지방비		기타	비고
		시도비	시군구비
126,657	40,000	-	86,657

ㅇ 집행계획(지방비 포함 총 사업비 집행계획)

(단위 : 천원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비고
설계비	7,900	실시설계비 1식	구비
조성비	84,438	컨테이너형 도서관 1동 36㎡(6m*6m) 휴게데크 1식	국비 구비
인테리어비	19,818	내부인테리어 1식	구비
수목식재	2,249	수목 700주 식재(도서관 주변)	구비
기타	2,746	전기공사 및 냉난방기 설치 등 1식	구비
도서구매	8,000	도서구매 1식(560권)	구비
운영물품비	1,506	운영물품 구매 1식	구비
계	126,657

4. 사업추진일정 [변경]

⇒ 변경사유 : 당초 ‘14년도 사업을 위해 국비(40백만원)는 확보하였으나 지방비(40백만원) 확보 지연으로 ‘15년도 작은도서관 조성 사업 시행(지방비 확보)

ㅇ  ’15.  3.  : 설계용역 착공

ㅇ  ’15.  7.  : 설계용역 준공

ㅇ  ’15.  9.  : 시설물공사 착공

ㅇ  ’15. 10.  : 인테리어 공사 착공

ㅇ  ’15. 11.  : 도서관 공사 및 인테리어 공사 준공

5. 작성자

ㅇ기관명 : 서울특별시 동작구     소속 : 공원녹지과 자연생태팀

ㅇ담당자 : 직급 녹지8급     성명 김일호

ㅇ연락처 : 전화 02-820-9848 / 팩스 02-820-9980 / 전자우편 revolutionist@dongjak.go.kr