1. 뚝도아리수정수센터 유효율 향상

뚝도아리수정수센터(3146-5541)	소 장 : 김 동 기 / 과장 : 서 한 호 / 담당 : 이 금 재

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	5대 도시 분류	(서울시)

전략목표 (성과목표)	서울시
	실․본부․국	“아리수정수센터별 유효율 향상”
	과․담당관	뚝도아리수정수센터 유효율 향상
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년
		아리수정수센터 유효율 향상	97.3%	97.9%	98.1%	98.3%
업무 프로세스		① 정수장 유효율 향상 계획 수립 → ② 현장여건 조사 등 유효율 증가 사유 파악 → ③ 유효율 향상 개선을 위한 적정 공정관리 → ④ 정수장 유효율 실적 향상
협력체계 (파트너십)	내 부	생산부 생산관리과
	자치구
	외 부

□ 사업목적

○  뚝도아리수정수센터 2계열 시설 현대화사업 등으로 안정적인 정수샌상 및 수질관리에 어려움이 예상됨에 따라 정수생산 대책을 추진하여 안정적으로 생산량 관리 및 경영

개선에 기여하고자함.

□ 2014년 목표

○ 정수장 유효율 향상 개선 : 98.2%(전년대비 0.2% 상향)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 1월 ~ 12월

○ 유효율 향상을 정수장 여건 파악

- 시설현대화 등으로 시설보완 및 경사판침전지 청소, 2계열 여과지 하반기 신설 시운전

(예정)으로 유효율(2014년 목표 98.2%) 관리 어려운 여건임

- 공장 가동율이 타정수장에 비해 높아 정수처리 및 수질관리 어려움

(뚝도 80.9%, 타 정수장 평균 74.8% 미만)

- 원수비, 동력비, 약품비 등 인상으로 생산원가 상승 예상됨

- 정수지 벽체 보강공사(내부방식)로 안정적 정수공급을 위한 대책 필요

- 배출수처리시설 노후화 등으로 누수 발생하여 재활용 제한

○ 유효율 향상을 위한 정수생산계획

- 2014년 생산목표 : 취수량 - 40.5만톤/일,  송수량 - 39.7만톤/일

- 전력비 절감을 위한 생산 계획

- 계절별, 시간대별로 취․송수펌프를 탄력적으로 최적 운영

(최대부하시간대 최소운전, 경부하 시간대 최대 운전)

○ 유효율 향상을 위한 정수생산 주요공정관리 계획

- 응집지, 침전지, 여과지, 정․배수지, 송수펌프, 배출수지 적정 운영관리

- 유효율 월별 증감현황 분석 관리

□ 세부추진계획

○  공정별 운영방법 개선 및 무효량 활용방안 추진

- 침전지, 정수지 청소시 펌프를 활용한 재활용으로 최대한 퇴수물량 억제

- 2계열 경사판침전지 시설보완 및 경사판 청소등 중복되지 않도록 조정 운영

- 여과수 수위, 지속시간과 함께 여과수 탁도등을 고려하여 역세척 주기 탄력적 운영

- 구내용수 및 배출수 방류량 등 유량계 활용하여 사용유량 정확하게 계측 확인

․ 구내용수배관 유량계 설치 : Φ200mm 1개소(‘13년 설치 활용)

○  노후시설물 주기적인 순찰점검으로 누수량 저감 및 T/F팀 구성 운영

- 순찰 점검을 강화하여 지하공동구 등 구조물 및 구내배관의 누수발견시 신속복구체계 구축 운영

․ 누수발생시 등 긴급복구 가능토록 복구업체 비상연락망 구축

※ 2013.12월 #2계열 침전지 누수발생 순찰시 확인하여 보수 추진중임

- 배출수처리장 노후 회수관로 교체하여 재활용량 증대

․ 회수관로 : Φ800mm, 100m (2014년 예산 반영)

- 유효율 향상 T/F팀 구성 운영

․ 구성 : 현재 구성되어 운영되고 있는 시설현대화 및 고도정수처리시설 관련 T/F팀을 활용 추진

(운영과,보수과 화공,기계,전기,토목 등 분야별 구성)

․ 운영 : 시설현대화 관련 T/F회의시 유효율향상방안 병행 검토 및 토론

○  각종 유량계 정밀도 등 주기적 정도관리 철저

- 도⚫송수관로 유량계 오차관리 철저(외부기관 정밀 검정 의뢰 등)

․ 강북 도수관로 통합원수 유량계 정밀도 확인(연 2회 이상)

○  유효율 월별 증감현황 분석 관리

- 생산일보에 의한 유효율 일일분석 시행

- 월별 계통별 정확한 분석에 의한 유효율 증감현황 분석 및 개선방안 강구

□ 세부일정계획

월별	추진계획	추진계획률(%)
1월
2월	○ 2014년 유효율 향상 대책 수립
3월	○ 월별 유효율 추진 분석
4월	○ 월별 유효율 추진 분석 ○ 응집‧침전지 등 청소시 펌프 활용 이송후 청소로 최저수량 퇴수
5월	○ 월별 유효율 추진 분석 ○ 유효율 향상을 위한 배수정 펌프 및 배관 설치 작업
6월	○ 월별 유효율 추진 분석 ○ 침전지 슬러지콜렉터 운영횟수 조정(2일1회 → 3일 1회) 및 가동 자동타이머 교정
7월	○ 월별 유효율 추진 분석 ○ 침전 스컴제거기 운영 효율방안 마련
8월	○ 월별 유효율 추진 분석 ○ 하절기 응집지 및 침전지 스컴제거 방안 강구
9월	○ 월별 유효율 추진 분석
10월	○ 월별 유효율 추진 분석 ○ 역세척 시퀀스 재 조정
11월	○ 월별 유효율 추진 분석
12월	○ 2014년 유효율 유효율 추진 분석