2014년 하수도사업특별회계 재배정 부진사업 목록

2014.9말 기준

연번	세부사업명	예산액(천원)	사업기간	9월말 공정율(%)	자치구	비고
1	행당동 138~158번지 일대 침수방지	2,200,000		0%	성동구
2	마장동 중앙선 철로 구조불량 하수관로 개선	1,300,000		0%	성동구
3	목동 신시가지내 오수관로 개량(10차)	900,000	2014.6.16~ 2014.12.15	55%	양천
4	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	370,000	2014.5.19~ 2015.1.13	45%	양천
5	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비	6,773,000	2014.2.17~2014.12.31	0.0	강서구
6	신길역 주변 하수관 이설	1,400,000	2014.03.31~11.30	50%	영등포구
7	노량진2동 동작구청 주변일대 침수해소	1,500,000	2014.7.15~ 2014.12.31	7.0%	동작구
8	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설(1구간-내방역~반포천)	5,000,000	14.2.27~15.12.31	19%	서초구
9	방배동 효령로 일대 하수관거 개량	600,000	14.05.30~14.10.31	10%	서초구
10	초동 18-6~청계천간 사각형거 보수보강	1,200,000	2014.3.18~ 2014.9.13	63%	중구
11	정릉동 882-6~674-4외 2개소 사각형거 보수보강	400,000	14.9.15~15.1.12	15%	성북구
12	하월곡동 80-51~69-2 주변 사각형거 보수보강	400,000	14.9.11~2015.1.8	20%	성북구
13	갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 하수관로 보수보강	500,000		0%	은평구
14	대방동 5-24~14-9간 하수관로 보수보강	1,000,000	2014.5.13.~ 2014.12.30.	55.0%	동작구
15	역삼동 705-24번지 외 1개소 사각형거 보수보강	2,200,000	2014.06.13~12.09	35%	강남구
16	논현동 162-11~165번지 외 3개소 사각형거 보수보강	700,000	2014.06.10~12.06	30%	강남구
17	신사동 573~626-78간 사각형거 보수보강	700,000	2014.05.21~11.16	35%	강남구
18	학동사거리~신사동 656-20 외 1개소 사각형거 보수보강	1,400,000	2014.06.23~12.19	23%	강남구
19	둔촌로 일대 하수관로 신설	6,000,000		0%	강동구