문서번호	수도자재관리센터-24868
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
협조	행정관리팀장
	주무관

2014년 회계연도 세출예산

사고이월 보고(공사자재관리팀)

2014. 12

2014년 회계연도 세출예산 사고이월 보고(공사자재관리팀)

발주자재 납품기한의 미도래 및 업체의 납품지연에 따라 공사자재관리팀에서 발주한 공사용자재인『덕타일 주철관 구매(대형41)』외 3건에 대한 2014년 회계연도 세출예산 사고이월을 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		사고이월 총괄

□ 사고이월 총괄

(단위:천원)

구 분	사고이월 건수	사고이월 금액	비 고
송.배수관 정비공사	2건	3,077
노후송.배수관정비공사	2건	951,138
계	4건	954,215

□ 사고이월 사업별 세부현황

(단위:천원)

사업명 (건 명)	계약금액	계약자	계약일자	납품기한	목 (세목)
송.배수관정비공사 - 덕타일 주철관 타이튼(2종)100mm외 7종구매 (대형41번)	178,540	㈜신안 주철 (대표:이진우)	‘14.07.15	‘14.09.24	시설비 및 부대비 (시설비)

사업명 (건 명)	계약금액	계약자	계약일자	납품기한	목 (세목)
노후송.배수관정비공사 - 덕타일 주철 이형관 구매 (대형65번)	250,464	㈜신안 주철 (대표:이진우)	‘14.10.2	‘14.12.11	시설비 및 부대비 (시설비)
송.배수관정비공사 - 덕타일 주철이형관 구매 (대형70번)	89,505	㈜신안 주철 (대표:이진우)	‘14.10.15	‘14.12.03	시설비 및 부대비 (시설비)
노후송.배수관정비공사 - 수도용 덕타일주철관 및 이형관[내면 에폭시 수지 분체도장(BPF)] 구매(대형87)	1,282,000	한국주철관 공업(주) (대표:홍동국)	‘14.12.12	‘15.02.10	시설비 및 부대비 (시설비)

Ⅱ		사고이월 사유

□ 덕타일 주철관 타이튼(2종)100mm외7종구매 (대형41번)

◯ 우리센터에서 조달구매 발주한 건으로서 납품업체(신안주철)의 사정으로 납기가 지연되어 사고이월이 불가피 함.

□ 덕타일 주철 이형관 구매(대형65번)

◯ 우리센터에서 조달구매 발주한 건으로서 납품업체(신안주철)의 사정으로 납기가 지연되어 사고이월이 불가피 함.

□ 덕타일 주철이형관 구매 (대형70번)

◯ 우리센터에서 조달구매 발주한 건으로서 납품업체(신안주철)의 사정으로 납기가 지연되어 사고이월이 불가피 함.

□ 수도용 덕타일 주철관 및 이형관[내면 에폭시 수지 분체

도장(BPF)] 구매 (대형87번)

◯ 우리센터에서 일반공개경쟁 발주하여2014.12.12계약을 체결하였으나 제작,납품에 필요한 납품기한(계약일로부터 60일)이 미도래 하여 사고이월이 불가피 함.

Ⅲ		향후 추진계획

◯ 상수도 사업본부 예산담당에게 사고이월 조치 요구

붙임 :  1. 2014년도 사업별 사고이월 명세표 1부.

2. 사고이월 사업별 명세표 각 1부.

3. 예산회계시스템 출력사항 1부. 끝.