'14년 2/4분기 재난위험시설(D․E급) 정비현황

서울시 소관 재난위험시설(D․E급)에 대한 ‘14년도 2/4분기 정비현황을 제출함

Ⅰ		재난위험시설 지정 현황

❍ ‘14년 2/4분기 조사결과, 재난위험시설은 총 514개소로서

⇒ ’14년 1/4분기 조사결과 552개소 보다 38개소 감소

- 유형별 : 시설물 103개소(지정6, 해제5), 건축물 411개소(지정58, 해제97)

- 등급별 : D등급 487개소(지정60,해제95), E등급 27개소(지정4,해제7)

구분		합계(개소)			D등급			E등급
		계	시설물	건축물	소계	시설물	건축물	소계	시설물	건축물
2014.3.31		552	102	450	522	101	421	30	1	29
2014	신규	64	6	58	60	5	55	4	1	3
	해제	102	5	97	95	5	90	7		7
	증감	△38	1	△39	△35	0	△35	△3	1	△4
2014. 6.31 현재		514	103	411	487	101	386	27	2	25

Ⅱ		’14. 2/4분기 재난위험시설 정비 현황

‘14. 2/4분기 정비실적

❍ 총 616개소(당초 552, 신규 64)중 102개소(D등급91, E등급 7)

- 소유자별 : 공공 17개소(시설물 1, 건축물 16), 민간 85개소(시설물 4, 건축물81)

- 분 야 별 : 시설물 5개소(축대․옹벽 3, 대형토목공사장1, 기타1)

건축물 97개소(대형건축공사장85, 건축물 12)

- 정비방법 : 등급조정 44개소, 준공 50개소, 보수․보강 7개소,

철거 및 개축 1개소

※ 첨부 1 : '14. 2/4분기 재난위험시설 정비(해소) 현황

정비 실적 분석

❍ ‘14년 283개소 해소를 목표로 한 가운데, 2/4분기 정비결과 36%, 102개소 해소

- 2014년도 특정관리대상시설 등 지정관리지침을 반영한 공사장의 등급조정 및 준공이 주를 이루고 있으며(44개소)

- 관악구 강남아파트 17개동, 영등포구 남서울아파트13개동 등 아파트 단지의 정비사업의 부진으로 해소가 지연되고 있음

- 대부분 민간소유의 시설로 소유자의 안일한 인식이 해소의 방해 요소임

분기별		계	보수보강	철거	재가설	준공	등급조정	기타
전체 재난위험시설		566
2014년 정비대상		283	30	20		132	101
2014 정비 실적 (계획)	계	283	30	20		132	101
	1분기	88	4	1		26	57
	2분기	102	7	1		50	44
	3분기	39	10	9		20
	4분기	54	9	9		36

Ⅲ		재난위험시설 안전조치 현황

❍ 재난위험시설 514개소 안전조치 현황

(단위: 개소)

구 분	합 계	통행제한	사용금지 (시설폐쇄)	이주완료 (공․폐가)	이주중 (거주)	계측기 설치	기 타 정기점검 등
합 계	514			19		7개동78개소	514개소
공공시설	100
민간시설	414			19		7개동 78개소	514개소

Ⅳ		향후 조치계획

❍「재난위험시설 해소를 위한 시·자치구 합동 TF 팀」운영  활성화를 통한 재난위험시설 해소 적극 추진

- 재난위험시설 E급에 거주민을 우선 퇴거조치

- 임대주택 공급확대, 보증금 융자 등 지원확대를 통한 거주자 퇴거 유도 및 독려

❍ 재난위험시설물에 대한 계측기 설치 및 순찰을 강화하여 시설물 유지상태 상시 점검 등 선재적 안전관리 강화

첨 부 1	‘14. 2/4분기 재난위험시설 정비(해소) 현황

○ 합  계

구 분	‘14.2/4분기 해소내역				비 고
	합계	철거․재가설 (준공)	보수보강	기타(등급조정 )
합 계	102	51	7	44
시설물	5	1	2	2
건축물	97	50	5	42

○ 시설물

구 분		계	철거․ 재가설 (준공)	보수 보강	기타 (등급조정)	비고
합 계		5	1	2	2
도 로 시 설	소 계
	지하차도	1	1
축대․옹벽․석축 등		4		2	2

○ 건축물

구 분		계	철거․ 재가설 (준공)	보수 보강	기타 (등급조정)	비고
합계		97	50	5	42
지방공공청사
공동주택	소 계	12
	아파트
	연립주택	1		1
기타	노후건물 등	11	1	4	6
다중이용 건 축 물	소 계
	판매시설
	위락․휴게시설
건 축 공사장	소 계	85	49		36
	대형공사장	85	49		36

※ 특정관리대상시설 지정 대상에 따라 분류 작성(자체관리대상 제외)