남산1호터널외 5개소 노후방재설비 보완공사

(도로시설과/서부도로사업소 기전과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 용산구 한남동 772-3

◦규    모 : 한남관리실 송풍기 2대 제작설치

◦기    간 : 2014.9.5～ 2015.2.2 (15.1월말 현재 공정율: 70%)

◦총사업비 : 1,300,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 남산1호터널외

5개소 노후방재설비 보완공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,300,000,000	1,300,000,000	948,767,700	835,470,100	113,297,600 ( )	484,237,800
용 역 비
	도 급 비	1,300,000,000	1,300,000,000	948,767,700	835,470,100	113,297,600 ( )	484,237,800
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 본 사업은 현재 진행공정이 70% 진행 중에 있고, 납품기한인2015.02.02(월)을 지나서 납품할 것으로 예상되며, 납품 후 설치기간이 30일 이상 소요될 것으로 예상됨.