“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”
		강남구
수신	서울특별시장(교통운영과장)
(경유)
제목	2014 교통소통개선사업(탄천1교) 교통안전시설 설치 비용 요청

1. 교통운영과-10601(2014.6.9)호와 관련입니다

2. 위와 관련, 우리구 대치동 13번지 일대 도로교통소통개선사업과 관련하여 아래와 같이 교통안전설치비용의 추가 사유가 발생하여 요청하니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

○ 위  치 : 강남구 대치동 13번지 일대

○ 주요내용 : 송파→수서역 방면 좌회전 신설

○ 주요공사 내용 : 교통섬 확대, 신호등 제거 및 이설, 차로재구획 등

나. 교통안전시설 보강 내용

구 분	금액	물량	사 유
총 계	29,059,400
표지병	11,859,400	602개	좌회전 차량 교각 및 교통섬 충돌방지를 위한 교통안전시설물(표지병) 보강 설치
방호울타리	17,200,000	80m	좌회전 굽은차로로 인한 보행자 안전사고 예방을 위한 방호울타리 일부 설치
노면제거	6,090,950	1,075m	전체 차선 삭선물량 5,241m의 20% 증가

. 끝.

							강남구청장
주무관										교통시설팀장										교통정책과장
협조자
시행			교통정책과-17128									(	2014.10.17.					)		접수			교통운영과-19355								(	2014.10.17.					)
우	135-705					서울시 강남구 학동로 426															/			www.gangnam.go.kr
전화		02-3423-6405						/전송			02-3423-8848					/	kimjhat@gangnam.go.kr												/	비공개(5)