<서식 3>

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

(2014,도시안전실 물재생시설과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 강서구 양천로 201(서남물재생센터 내)

◦규모 : 분뇨처리시설 4,000ton/일

◦기간 : 2012.11.15 ～ 2015.07.18(15.1월말 현재 31%)

◦총사업비 : 73,200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업, 시설비 및 부대비

- 이월세부내역                                          (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		22,120,000,000	22,088,600,000	21,475,809,940	5,897,060,890	15,578,749,050	644,190,060
공 사 비		21,230,000,000	21,209,000,000	20,597,962,740	5,454,395,690	15,143,567,050	632,037,260
	도 급 비	13,782,000,000	13,782,000,000	13,782,000,000	3,612,000,000	10,170,000,000 ( )	-
	폐 기 물	21,000,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	-	10,550,000
	관 급 비	7,427,000,000	7,416,550,000	6,805,512,740	1,831,945,690	4,973,567,050	621,487,260
	설계보상비	-	-	-	-	-	-
감리용역비		870,000,000	869,600,000	869,099,000	433,917,000	435,182,000 ( )	901,000
시설부대비		20,000,000	10,000,000	8,748,200	8,748,200	- ( )	11,251,800

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 3차공사가 ‘14.11착공하여 ’15.7.18 준공예정으로 사고이월 필요

- 관급자재가 ‘15.5 장비 반입예정으로 설치시기 미도래

- 가시설 공법변경으로 공사기간 추가소요

(어스앵커 7단 → 어스앵커 2단 + 스트러트)

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

<서식 5> 엑셀서식 작성(별도 송부)

2013회계연도 사고이월 집행현황

( 도시기반시설본부)

실국명	부서명	사업명	사고이월액	집행액	미집행액	집행율	불용사유
계			10,664,411,810	10,641,348,240	23,063,570	99.78%
도기본	설비부	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	8,417,340,000	8,417,340,000	-	100%	-
도기본	설비부	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 관급자재비	1,997,464,810	1,974,401,240	23,063,570	98.85%	관급물량정산
도기본	설비부	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역	249,607,000	249,607,000	-	100%	-