1		방음시설 설치 및 보수보강

특별시도 주변 교통소음 기준을 초과한 지역의 소음 저감을 위해 방음

시설을 설치하여 평온한 면학분위기 및 쾌적한 주거환경 조성

Ⅰ		사업개요

❍ 사업내용

-  노후 및 파손으로 도시환경을 저해하는 방음벽 개량

(H=5.0~8.0m, L=1,051m)

❍ 사업기간

-  2014.1 ~ 12

❍ ’14년 예산액 : 2,000백만원

※ 총사업비(‘13~’15) : 6,003백만원

- ’13년 :    2,003 백만원 ,  ’14년 : 2,000 백만원 ,  ’15년  :  2,000백만원

(단위:백만원)

구 분		2014예산	2013예산	증 감	산 출 내 역
계		2,000	2,003	△3
	시설비	2,000	2,003	△3	· ○ 위 치 : 여의도고교앞(2차)외 6개소 ○ 개 요 : 방음벽 정비 7개소 - 여의도고교앞(2차) 방음벽 정비 : H=5m, L=68m=241 - 영등포초교앞 방음벽 정비: H=8m, L=57m =210 - 잠실아주중학교 방음벽 정비: H=6m, L=160m =442 - 풍납중학교 방음벽 정비: H=6m, L=181m =500 - 서초 반포중학교방음벽 정비:H=6.5m, L=200m =156 - 남산1호터널앞 방음벽 정비 : H=6m, L=160m=351 - 성북 솔샘로외 1 방음벽 정비:H=6m, L =160m =100

❍ 추진방식 (직접사업 수행)

-  포괄적인 예산으로 매년 편성한 후 정비 사업비를 자치구에

재배정하여 사업추진

Ⅱ		2014년 추진현황

□ 그간 추진실적

❍ ‘14. 2. 1 : 1차 배정계획 수립(7개소 , 5개구청)

❍ ‘14. 2. 4 : 1차 배정(1,481백만원)

- 시행 : 중구, 성북구, 영등포구, 송파구,서초구

❍ ‘14. 4. 1  :  2차 배정계획 수립(서초구)

❍ ‘14. 4. 7 :  2차 배정(188백만원 –반포중 주변 방음벽 설치-시설비)    ❍ ‘14. 6.10 : 3차 배정계획 수립(중구)

❍ ‘14. 6. 20 : 3차 배정(331백만원 –남산1호터널-시설비)

‣ 총 7개소  H=5.0~8.0m. L=1.051m

-남산1호터널 방음벽 보수보강공사 H=6m,L=160m(실시설계 완료, 착공)

- 성북 솔샘길 방음벽 정비 H=6m,L=160m (‘14.9.11 준공)

- 여의도고등학교, 영등포초교 앞 방음벽 교체 H=5~8m,L=125m (‘14.8.31 준공)

- 풍납중, 아주중학교 방음벽 설치 H=6m,L=341m (‘14.10 준공예정)

- 반포중학교 방음벽 정비 H=6.5m,L=200m (‘14.6.30 준공)

❍ ’14년 집행현황(현재 9월기준)                          (단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2014	2.000	-	-	2,000	1,686	-	314	85%

❍ 최근 3년간 예산집행 실적                            (단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2011	4,548	599		5,147	4,758	297	92	93%
2012	2,100	297		2,397	1,729	501	167	72%
2013	2,030	500		2,503	2,447	-	56	98%

□ 향후계획

❍ ‘14.10.30  : 1차 공사 완료

❍ ‘14.12.31  : 2차 공사완료 및 준공

Ⅲ		성과분석(필수기재)

❍ 잘된 점

- 예산편성 범위 내에서 소음측정, 노후도 및 안전성 등을 종합검토하여     신설 및 정비함으로써 주민생활 편익증진

❍ 보완할 점

- 예산에 비해 방음벽 설치요청 민원이 꾸준히 증가되고 있어 주민생활 편익    증진 차원에서 예산 투자가 필요함.

- 공동주택 인·허가시 소음방음대책 (조건부여)강구 철저 .