디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 기본 및 실시설계

추가 보완 지반 조사 계획서

2014. 9.

10장

공사관리

목차

C  ∙  O  ∙  N  ∙  T  ∙  E  ∙  N  ∙  T  ∙  S

제1장 과업개요

1.1 조사 목적	1

1.2 조사 범위	1

1.3 조사 계획	2

1.4 조사 기준	3

1.5 시추공 폐공처리 계획	4

제2장 지반조사 현황

2.1 지반조사 수량	6

2.2 지반조사 세부현황	6

제3장 세부추진 계획

3.1 장비현황	9

3.2 예정공정표	9

첨부#1 : 지반조사 위치도

제1장  과 업 개 요

	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 기본 및 실시설계

1.1  조사 목적

조 사 목 적	∙기본설계 조사결과를 바탕으로 실시설계 단계에서 추가 보완이 필요한 구간에 대하여 보완 조사를 통해 설계에 요구되는 지반정보를 제공함으로써 설계의 내실을 기하고자 함. ➡ 지반조사 및 성과분석 보완으로 신뢰성 향상, 합리적･경제적･친환경적 설계 도모

1.2  조사 범위

행 정 구 역	∙시 점 : 디지털3단지(가산동319-7) ∙종 점 : 두산길(독산1동998-10)		과 업 위 치 도
노 선 현 황	∙구 간 : STA.0+000~STA.0+453 (총 연 장 : 453m) ∙지하차도 : 1개소 (L=320m) ∙집 수 정 : 1개소
특 이 사 항	∙경부선 하부 통과에 따른 비개착 공법 적용필요 ∙지하차도 설치에 따른 가시설 계획 ∙지하수위 변동에 따른 인접 구조물 영향 최소화를 위한 차수대책 ∙도심구간으로 민원발생 예상

조 사 범 위	▷ 1차 조사 ∙ 시추조사 : 5공 ➡ 주요 구조물인 집수정, BOX, U-Type구간 각 1공, 점토층 연속성 확인 및 지층구성 파악을 위한 시․종점부 각 1공 ∙ 현장시험 : 지반의 공학적 특성 파악 및 설계정수 획득을 위한 현장시험 실시 ➡ 현장투수시험 3회, 공내재하시험 1회, 공내전단시험 1회 ∙ 실내시험 : 토사, 암석에 대한 물성 및 1축 압축강도 시험
	▷ 2차 조사 ∙ 실시설계 착수단계 자문회의 : BOX구간 시점부 및 부력방지앵커 설치 U-Type구간에 대한 보완조사 필요 ∙ BOX구간 시점부의 경우 교학사 건물로 인한 정위치 조사 불가 ➡ 옆 건물인 다함이텍 부지내에서 본선 방향으로 최대한 근접하여 조사계획 후 민원인과 협의하였으나 부지 진입 불가에 따라 시공시 확인조사 수량으로 반영 ∙ 부력방지앵커 설치 U-Type구간 기반암 확인 조사를 위한 시추조사 1공 추가계획

1.3  조사 계획

1.3.1 조사흐름도

기본

및

실시

설계

⁀

착수

단계

‿

사전

조사

	기 존 문 헌 조 사
	∙기존자료 수집 및 분석 ∙지형 및 지질개황 분석 ∙강우현황 등
	기본계획 성과품 검토												광 역 조 사
	∙예상문제점 파악 ➡ 대책방안 수립												∙상세 지표지질조사 ∙선구조 분석
물리탐사(필요시)						현장조사 및 시험									실 내 시 험
∙굴절법탄성파탐사 ∙전기비저항탐사						∙시추조사, 표준관입시험 ∙투수/수압시험, 공내재하시험 등									∙토질 물성 및 역학 ∙암석 물성 및 역학
		지반조사 성과분석
		∙지질취약대(암종경계, 단층대 및 파쇄대 등) 분포특성 파악 ∙지층분포 및 지반특성 파악 ∙암반분류 및 지반정수 산정 ∙불연속면 특성 파악 ∙연약지반 분포특성 파악 ∙지하수 및 수리수문 특성 파악

예비

조사

상세

조사

성과

분석

	보완조사 및 현장시험											실 내 시 험
	∙시추조사 ∙표준관입시험											∙토질 물성 및 역학 ∙암석 물성 및 역학
		지반조사 추가 성과분석
		∙실시설계 단계에서 추가 요구되는 지반 특성에 대한 추가 성과 분석 ∙지층분포, 지반특성 파악 및 재검토 ∙암반분류 및 지반정수 적정성 검토 ∙연약지반 분포특성 파악 및 적정성 검토 ∙지하수 및 수리수문 특성 검토

실시

설계

⁀

보완

검토

‿

보완

조사

추가

성과

분석

1.4  조사 기준

조사기준	∙본 과업의 조사항목, 조사빈도 및 조사심도의 기준을 지반조사편람(서울특별시, 2006), 관련규정 및 과업지시서에 의거하여 지반조사 계획 수립

시추조사

구 분	과업지시서		적 용 기 준
	배치	심도 및 현장시험	배치	심도 및 현장시험
지하차도	-	∘기반암 확인 ∘기반암 깊을 경우 :계획고하 5m 또는 2D이상	∘시ㆍ종점 각1개소 ∘ 주요 구조물 통과구간 각1개소	∘계획고하 5m

현장시험

구 분	과업지시서	지반조사 편람	적 용 기 준
표준관입시험	∙1.5m 마다	∙KS F2307 (1.0m 마다)	∙KS F2307 (1.0m 마다)
공내재하시험	∙필요시	-	∙1회
공내전단시험	∙필요시	-	∙1회
투수시험	∙필요시	-	∙3회

실내시험

구 분		도급내역서	적 용 기 준
토질 물성시험		∙1회/공	∙1회/공
토질 역학시험		∙1회/공	∙1회/공
암 석 시 험	일축압축	∙1회/공	∙1회 (기반암 확인 공)

1.5  시추공 폐공처리 계획

폐공의 정의 및 개요	∙현재 또는 미래에 이용할 계획이 없고 오염방지를 위한 별도의 조치없이 방치되어 있는 지층을 굴착한 모든 공 ∙최근 들어 폐공을 통한 오수의 유입으로 지하수 오염 등의 환경오염 문제가 빈번히 발생하고 있으므로 시추조사 등에 의한 시추공은 조사완료 후 폐공처리를 하여야 함 ∙폐공처리를 통하여 폐공 내로 유입되는 지표 오염원 차단, 오염원의 수직적 이동 통로 제거 및 오염 유발 시설(케이싱 등)제거 등의 지하수 오염 방지 효과를 얻을 수 있음

1.5.1  관련법규

원상복구명령(지하수법 제15조)	처 리 대 책
∙허가․인가 등이 취소된 경우, 또는 개발․이용기간이 만료된 경우 ∙지하수 개발․이용을 위하여 굴착한 장소에서 지하수가 채취되지 아니한 경우 ∙소요수량이 확보되지 아니하거나 수질불량으로 지하수를 개발․이용할 수 없는 경우 ∙지하수의 개발․이용을 종료한 경우 ∙기타 원상복구가 필요한 경우로서 대통령이 정하는 경우	∙지표하부에 그라우팅이 되어 있는 경우에는 굴착깊이까지 불투수성 재료(시멘트 슬러리 등)를 주입하여 다짐하면서 되메움(공매작업) 실시 ∙지표하부에 그라우팅이 되어 있지 않고 보호벽(케이싱)이나 유공관(파이프) 등이 설치되어 있는 경우에는 가능한 이를 제거한 후 굴착깊이까지 불투수성 재료(시멘트 슬러리 등)를 다짐하면서 되메움(공매작업) 실시

1.5.2  폐공순서 및 방법

가. 퇴적층 시추공의 폐공

∙퇴적층 폐공은 암반층까지 굴착하지 않고 암반층 상부의 모래, 자갈, 실트 등 퇴적층 구간까지만 굴착한 시추조사공에 대한 폐공임

∙원상복구 방법은 케이싱을 인발하여 공 내부에 지하수위 상부까지 세사로 되메움을 실시하고 상부는 주변 토양으로 되메움 실시

나. 암반 시추공의 폐공

∙폐공 전 구간을 투수성 재료 되메움 구간, 불투수성 재료 되메움 구간 및 표면 처리구간으로 구분하여 각 구간별로 적합하게 되메우기를 실시

∙현장여건에 따라 지표부 표면처리 구간은 생략하여 되메움을 실시

다. 폐공순서 및 방법

∙공매재료의 양 결정 -시추공의 직경, 깊이, 지하 수위 파악 ∙시추공 내 접지 -Casing 및 검측 P.V.C Pipe 제거	∙공매재료의 충전 -시멘트벤토나이트물 또는 주변토양(토사층) -호스설치 후 공매재료 충전 -충전 시 호스를 올리면서 공매재료 부설	∙상부구간 마무리 -공매재료를 지표면 1.5m까지 충전 후 그 상부에 영농작업과 식생을 고려하여 양질의 흙으로 되메움 실시

폐 공 전	폐 공 중	폐 공 후

제2장  지반조사 현황

2.1  지반조사 수량

2.1.1 조사항목별 현황

구 분	조 사 항 목	단 위	수 량
			변경도급	1차 수행	2차 예정	계	증감
시 추 조 사	BX	공	-	-	-	-	-
	NX	공	5	5	1	6	▲1
현 장 시 험	표준관입시험	회	40	53	15	68	▲28
	현장투수시험	회	-	3	-	3	▲3
	공내재하시험	회	-	1	-	1	▲1
	공내전단시험	회	-	1	-	1	▲1
실내토질 물성시험	함수비시험	회	-	3	1	4	▲4
	비중시험	회	-	3	1	4	▲4
	액성한계시험	회	-	3	1	4	▲4
	소성한계시험	회	-	3	1	4	▲4
	입도분석	회	-	3	1	4	▲4
	체가름	회	-	3	1	4	▲4
	직접전단시험	회	-	-	-	-	-
	다짐시험	회	-	-	-	-	-
실내암석시험	일축압축강도시험	회	-	1	1	2	▲2

※ 1차 수행수량은 기본 및 실시설계를 위해 기 실시한 수량으로 민원 등 현장여건을 고려하여 시행 가능한 곳으로 실시하였음.

※ 실시설계 자문회의 보완 사항으로 BOX구간 시점부 및 부력방지앵커 설치구간에 대한 추가조사 필요에 의해 2차 조사 작업을 계획하였으나, 민원에 따른 BOX구간 시점부 진입 불가로 인해 부력방지 앵커 설치구간 1개소에 대한 보완조사를 계획하였음.

※ 최종 시추 결과에 따라 시추조사 심도 및 표준관입시험 수량의 변경이 발생할 수 있음

2.2  지반조사 세부현황

2.2.1 1차 조사 수행 결과

가. 1차 조사 수행 위치

구 분	공 번	위 치 (STA.)	이격거리	좌표		비 고
				X	Y
지하차도시점	BH-1	0+005.3	우측 2.7m	440,894.24	189,869.03	점토층연속성 확인
본선 주요 구조물 구간	BH-2	0+151.1	좌측 11.6m	440,942.06	190,008.94	집수정구간
	BH-3	0+181.5	우측 6.6m	440,923.10	190,039.21	BOX구간
	BH-4	0+225.0	우측 7.0m	440,920.61	190,082.60	U-Type구간
지하차도종점	BH-5	0+320.0	우측 5.0m	440,918.42	190,177.65	점토층연속성 확인

나. 1차 조사 결과

구 분	매립층(m)		퇴적층(m)		풍화토(m)		풍화암(m)		연암층(m)		경암층(m)
	출현	두께	출현	두께	출현	두께	출현	두께	출현	두께	출현	두께
BH-1	0.0	2.7	2.7	8.3이상	-	-	-	-	-	-	-	-
BH-2	0.0	2.8	2.8	9.0	11.8	5.2	17.0	1.0	18.0	4.5	22.5	-
BH-3	0.0	2.7	2.7	9.7	12.4	1.1	13.5	0.8	14.3	-	-	-
BH-4	0.0	2.4	2.4	7.6이상
BH-5	0.0	2.5	2.5	8.5이상	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 시추조사, 현장 및 실내시험 결과 상세 내용은 지반조사 보고서에 수록.

2.2.2  2차 조사 계획

가. 시추조사 및 실내시험 계획

구 분	공 번	위 치 (STA.)	계획심도 (GL.-m)	실내시험
				토질물성	암석일축
U-Type 부력방지앵커 설치구간 기반암 확인	NBH-1	0+270	18.0	1	1

2.2.3  지반조사비 예상 증감 현황

구 분	규 격	단위	수량			단 가	금 액				증감
			변경 도급	1차 수행	2차 계획		변경 도급	1차 수행	2차 계획	계
1. 지반조사							23,723,335	20,306,681	4,547,349	24,854,030	▲1,130,695
가. 시추조사	NX						22,369,555	16,134,829	3,855,525	19,990,354	▽2,379,201
1) 점토층		m	10.0	19.8	4.0	127,123	1,271,230	2,517,035	508,492	3,025,527	▲1,754,297
2) 모래층		m	50.0	34.1	6.0	149,783	7,489,150	5,107,600	898,698	6,006,298	▽1,482,852
3) 자갈층		m	35.0	9.5	5.0	301,225	10,542,875	2,861,637	1,506,125	4,367,762	▽6,175,113
4) 연암층		m	5.0	20.7	3.0	164,475	822,375	3,404,632	493,425	3,898,057	▲3,075,682
5) 기계기구설치		회	5	5	1	278,406	1,392,030	1,392,030	278,406	1,670,436	▲278,406
6) 폐공되메우기		공	5	5	1	170,379	851,895	851,895	170,379	1,022,274	▲170,379
나. 현장시험							1,068,960	3,305,032	400,860	3,705,892	▲2,636,932
1) 표준관입시험		회	40	53	15	26,724	1,068,960	1,416,372	400,860	1,817,232	▲748,272
2) 현장투수시험		회	-	3	-	107,749	-	323,247	-	323,247	▲323,247
3) 공내재하시험		회	-	1	-	657,677	-	657,677	-	657,677	▲657,677
4) 공내전단시험		회	-	1	-	907,736	-	907,736	-	907,736	▲907,736
다. 실내시험							-	582,000	234,000	816,000	▲816,000
1) 토질시험		회	-	3	1	174,000	-	522,000	174,000	696,000	▲696,000
1) 암석시험		회	-	1	1	60,000	-	60,000	60,000	120,000	▲120,000
라. 시료상자제작		개	5	5	1	56,964	284,820	284,820	56,964	341,784	▲56,964

※ 조사비는 조사결과에 따라 변경 될 수 있음.

제3장  세부 추진계획

3.1  장비현황

3.1.1  장비투입 계획

구 분	1차 수행	2차 계획	합 계
조 사 수 량	5	1	6
장비투입 대수	1	1	2

3.1.2  주요 조사장비

가. 현장조사 및 시험

조 사 항 목	장 비 명		시 추 조 사
시 추 조 사	∙시추기(T-4, OP300, SD4000, TS300)

3.2  예정공정표

구 분	조사기간																				소요일
	9월12		14		16		18		20		22		24		26		28		30
굴착행위신고 및 인허가																					12일
현장 조사 및 시험																					3일
실내시험																					5일
현장 정리 및 폐공																					2일

※ 인허가 기간, 장비 진입 및 민원 등에 따라 공정의 변경이 발생할 수 있음

첨 부 #1

(지반조사 위치도)