정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시안전실 하천관리과	②담당자 (연락처)	부서장 : 토목4급 한유석 (2133-3860) 담당자 : 토목6급 김동철 (2133-3864)
③정책사업명	용산구 한강로 일대 방재시설 확충사업
④선정기준	100억원 이상사업	⑤사업기간	2013.12월 ~ 2016.12월
⑥주요내용	○ 사업목적 - 지역적으로 저지대인 용산구 한강로 일대의 반복적인 침수피해를 해소하고 치수 안정성을 도모함으로써 시민의 안정적인 편의를 제공키 위함임 ○ 사업개요 - 위 치 : 한강대교 북단 ~ 남영역간(한강로 일대) - 규 모 : 관로 1.3km, 펌프장 860톤/min ○ 기 간 : 2013. 12 ~ 2016. 12(장기계속공사) ○ 총사업비 : 50,258백만원(펌프장 30,958, 하수관로 19,300) ○ 추진현황 - ‘13.07.26 : 기본 및 실시설계 완료 - ‘13.11.20 : 빗물펌프장 도시계획(방수시설) 결정 - ‘13.12.26 : 펌프장 공사발주 ○ 현안사항/조치계획 - 펌프장 인근 주민 민원발생으로 공사 착수 중단된 상태임 - 민원해소 방안에 대해 적극 검토중임