2014. 기초소방시설 설치 계획

동작소방서

(예방과)

2014. 기초소방시설 설치 계획

홀몸노인, 소년소녀가장, 기초생활수급자 등 저소득 취약계층의  화재예방을 위해 기초소방시설을 무료 보급 ․ 설치하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 서울특별시 예방과-10696(2014.5.15.)호 “2014.기초소방시설 설치       계획 알림”

□ 서울특별시 예방과-13181(2014.6.24.)호 “2014년 기초소방시설

(단독경보형감지기) 계약체결 및 설치 계획 알림”

□ 서울특별시 주택의 소방시설 설치 조례(제5326호)

Ⅱ		개 요

□ 추진기간 : 2014. 7월 ~ 12월

※ 본부 계획[서울특별시 예방과-13181(2014.6.24.)호]에 의거 우리 서는 2014.10월중

단독경보형감지기 설치 예정

추진월	소 방 서	수량(개)	추진율(%)
7월	종로, 중부, 은평, 마포, 서대문	4,930	10
8월	동대문, 광진, 성북, 도봉	5,630	40
9월	노원, 중랑, 강북, 영등포	5,860	60
10월	강서, 양천, 구로, 관악, 동작	7,410	80
11월	용산, 강남, 서초, 강동, 송파	5,170	100
계	-	29,000	-

→ 추진일정은 소방서 기타 사유 및 계약업체 진행률에 따라 변동 가능

□ 보급대상 : 홀몸노인, 기초생활수급자 등 800세대

□ 계약방법(본부 추진) : 입찰에 의한 계약(제한경쟁) / 단가계약 체결

※ 예산과목 : 예방업무 추진 향상/시설비(401-01)/저소득층 소방시설 보급

□ 설치품목․수량 : 소화기(1.5㎏) 800개, 단독경보형감지기(배터리10년형) 1,290개

※ 한국소방산업기술원 소방용 기계․기구 형식승인 제품

□ 설치방법

❍ 단독경보형감지기 : 계약업체 설치, 각 119안전센터 직원이 검수

❍ 소화기 : 각 119안전센터 직원이 감지기 검수시 보급

Ⅲ		세부 추진계획

□ 업무 처리절차

단가계약 체결 및 예산배정	⇨	설치 예정대상 선정 (‘14. 7~8월)	⇨	납품요구 (‘14. 10월)	⇨	설치 및 보급 (‘14.10~11월)	⇨	검 수 및 대가 지급 (‘14. 11~12월)
본부		소방서		소방서 → 계약업체		계약 업체		소방서

□ 설치 예정대상 선정

❍ 기    간 : 2014. 7월 ~ 8월

❍ 세대선정 : 2,400여세대(설치대상의 3배) ※ 장기 부재자 감안 여유세대 확보

- 동작구청 사회복지과 등 저소득 취약계층 관리부서 협조로 명단 확보

- 확보된 명단 중 기 보급세대 명단 제외 후 설치 세대 선정

□ 단독경보형감지기 설치 추진

❍ 기    간 : 2014. 10월 ~ 12월

❍ 배정예산 : 금19,814,400원(단가 15,360원)

❍ 계약(설치)업체 :  ㈜케이텔(☏ 031-852-7372, *************)

❍ 납품 및 설치

- 납   품

‣ 납품요구 : 문서로 함을 원칙으로 하되 긴급 시 메일 또는 전화로 가능                        (소방서 → 계약업체)

‣ 품의등록 : 지방재정관리시스템(e - 호조)에 지출품의 등록(소방서)

- 설   치

‣ 납품요구한 날로부터 45일 이내 설치 ․ 보급 추진(계약업체)

□ 추진 대상은 반드시 800세대 또는 800세대 이상 추진(계약업체)

‣ 설치대상 주택 방문 및 설치(계약업체)

‣ 설치완료 후 세대 정보 및 설치사진을 소방서에 제출(계약업체 → 소방서)

- 검수 및 대가 지급

‣ 계약업체에서 설치 완료 요청일로부터 14일 이내 검수 완료(소방서)

□  119안전센터 직원이 설치세대 방문하여 단독경보형감지기 설치                상태 검수 및 소화기 보급(각 119안전센터)

․ 설치업체에서 제출받은 사진과 설치 현장 일치여부 확인

․ 단독경보형감지기의 부착상태, 배터리 연결상태 등 작동점검 실시

‣ 물품 검수 완료 후 대가 지급(소방서)

□ 소화기 설치 추진

❍ 기   간 : 2014. 10월 ~ 12월

❍ 납품 및 대가지급

- 납   품

‣ 납품요구 : 문서로 함을 원칙으로 하되 긴급 시 메일 또는 전화로 가능                        (소방서 → 계약업체)

‣ 품의등록 : 지방재정관리시스템(e - 호조)에 지출품의 등록(소방서)

‣ 납품기한 : 납품요구한 날로부터 20일 이내 납품(계약업체)

- 대가지급 : 물품 검수 완료 후 대가 지급(소방서)

❍ 소화기 설치

- 단독경보형감지기 설치상태 검수시 소화기 보급(각 119안전센터)

- 주택 방문시 단독경보형감지기 및 소화기 사용요령 교육(주택안전점검 병행)

Ⅳ		행정사항

❍ 각 119안전센터장은 단독경보형감지기 검수 및 소화기 보급에 적극 협조

❍ 단가계약 체결 대비 설치 세대수, 예정수량(설치개수)는 변동될 수 있음

- 증증장애 또는 거동불편 세대의 구획된 거실에 감지기 1개 추가 설치

❍ 설치세대의 관계인 부재, 연락처 오기, 연락두절, 기타 사유 등으로 인하여

추가대상 필요시 계약(설치)업체에 추가 대상 신속히 제공

❍ 기초소방시설 설치 최종결과(대가지급 금액, 세대별 설치수량, 검수완료현황 등)는

완료 후 5일 이내 본부 제출

붙임  1. 단독경보형 감지기 규격서 및 물품구매 특수조건 각 1부.

2. 단독경보형감지기 과업지시서 1부.  끝.