2014. 주요사업 예산집행 기본계획(변경)

소방청사 환경개선을 위한

당산센터 옥상 체력단련실 증축으로 인한 내진설계 대상으로 구조(내진)

안전진단을 실시하여 안전도를 확보 후 실시코자 함

Ⅰ. 추진근거

□ 건축법 시행령 제32조 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제56조, 제58조     □ 市소방행정과-35352(2013.12.31.)호 『2014년도 세입․세출 예산편성 결과 알림』      □ 市소방행정과-1577(2014.01.20.)호 『2014년도 세출예산 재배정 계획 시달(통보)』      □ 소방행정과-3747(2014.03.05.)호 『2014년도 주요사업 예산집행 기본계획』

Ⅱ. 예산현황

□ 예산배정 : 금41,891천원(금사천일백팔십구만일천원)

□ 예산과목 : 소방행정업무의과학화로고품질서비스제공/직무환경개선/

소방관서보수,보강공사/시설비(401-01)

Ⅲ. 주요사업현황

사업명	사업내용	사업비	비고
당산119안전센터 체력단련실 및 방수공사	체력단련실 개선 및 우레탄 방수	41,891,000

변경전

사업명	사업내용	사업비	비고
당산119안전센터 증축을 위한 구조(내진)안전진단	건축 구조검토 및 내진성능 평가 등	6,000,000
당산119안전센터 체력단련실 및 방수공사	체력단련실 개선 및 우레탄 방수	41,891,000
계		47,891,000

변경후

※ 부족한 예산은 서울소방재난본부 조직경영팀 예산담당 부서와 협의 후 확보

변경사유

○ 건축법 시행령 제32조 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제56조,            제58조(2009년7월16일) 3층이상, 지진구역1내 소방청사는 내진설계          대상으로 구조(내진)안전진단 우선 실시하여 결과에 따른 내진성능          설계 및 보강공사 추진

※ 1994년 10월 신축하여 2003년 11월 구조안전점검 후 2004년              12월 리모텔링 건축함

○ 서울특별시 공고 제2014-252호 도시관리계획(지구단위계획)결정(변          경)(안) [성내지구 외177개소 민간부문시행지침 일부 변경] (2월7일          시행)에 의거 50㎡ 미만 증축시 구 도시계획위원회 심의없이 증축이          가능함에 따라 구조(내진)안전진단 결과 판정 후 시행코자 함.

○ 서울특별시 건축조례 17조에 의거 가설건축물은 옥상설치 불가

Ⅳ. 세부추진계획

당산119안전센터 증축을 위한 구조(내진)안전진단

○ 사업개요

- 기 간 : 2014년 4월~5월31일

- 내 용 : 건축 구조검토 및 내진성능평가 등

- 예 산 : 금6,000,000원

○ 추진계획

월별	세부일정	비고
4월	발주계획, 입찰공고, 계약체결
5월	착수, 준공, 검사(수), 대금지급

○ 추진절차

성능평가	▶	설계	▶	공사
․ 구조(내진)안전진단		․ 보수․보강 실시설계		․ 보수․보강 추진

○ 계약방법 : 전자수의시담(조달청 G2B 전자시스템)

○ 예산과목 : 소방행정업무의과학화로고품질서비스제공/직무환경개선/

소방관서보수,보강공사/시설비(401-01)

○ 관련사진

당산119안전센터 체력단련실 및 방수공사

○ 사업개요

- 기 간 : 2014년 5월~6월30일

- 내 용 : 3층 옥상

· 체력단련실 개선 (천장, 벽면 내장재 철거 등 개선)

· 우레탄 방수 (바닥 182㎡, 벽 72㎡)

- 예 산 : 금41,891,000원

○ 추진계획

월별	세부일정	비고
5월	발주계획, 설계용역, 입찰공고, 계약체결
6월	착공, 준공, 검사(수), 대금지급

○ 계약방법 : 전자공개수의계약(조달청 G2B 전자시스템)

○ 예산과목 : 소방행정업무의과학화로고품질서비스제공/직무환경개선/

소방관서보수,보강공사/시설비(401-01)

○ 관련사진