14년 8월 서울 약령시 한방산업진흥센터 조성사업 추진실적

	< 건립 공사 개요 >
○ (사업목적) 서울약령시에 한의약박물관·한방의료체험시설 등을 건립하여 한방의료․관광의 중심지로 육성 ○ (사업위치) 서울 동대문구 제기동 1082번지 외 24필지 2,789.50㎡ (845평) ○ (연 면 적) 9,459.65㎡ (2,866평) 지하3층, 지상1～3층 ○ (소요예산) 46,525백만원(국비 50억원, 서울시 234.6억원, 동대문구 180.6억원) ○ (사업기간) 2012. 1. ～ 2016. 12. ○ (시설구성) 한의약박물관, 보제원, 약선홍보관, 입주사무실, 주차장(195면)

□ ’14. 8월 추진 실적

○ 2014. 8.12  기술자문위원회 개최(설계공모 선정시 심사위원 의견반영 여부 등 건축기술 분야 자문회의)

○ 2014. 8.25   공영주차장 및 한방산업진흥센터 건립관련 시설검토 등부서장 회의

○ 2014. 8.29  교통영향분석 및 개선대책 수립용역 계약

□ 향후추진일정

○ 2014. 9 ~  도시계획시설변경(주차장 ⇒ 주차장 및 문화시설 중복)

○ 2014.12 ~  공사발주

	< 그간 추진일정 >
○ ‘11. 7.~ ‘13. 9. 건축예정부지 확보 ○ ’13. 5. 서울약령시 한방산업진흥센터 건립 변경 계획 수립 ○ ’13.10. (안행부) 제1차 지방재정투자심사* 결과 ⇒ 재검토** * 시군구가 100억원 이상 신규사업을 할 경우 안행부 주관 지방재정투자심사를 거쳐야 함(지방재정투·융자사업심사규칙) ** (내용) ’14년 이후 계획된 국비 미지원(44억원)에 따른 시․구비 추가 부담분은 가용재원 범위에서 사업계획 조정 ○ ’13.11. (서울시) 제1차 지방재정투자심사 결과를 반영하여 복지부에 국고보조금(50억원) 수시배정 요청 ○ ’13.12. (복지부) 기재부에서 수시배정이 해제되어 서울시로 예산(50억원) 교부 ○ ’14. 1. (안행부) 지방재정투자심사 의뢰 ○ ’14. 3. (안행부) 제2차 지방재정투자심사 결과 ⇒ 조건부* 추진 * (내용) 한의약박물관 등 한방산업진흥센터 조성규모는 축소하되, 공영주차장은 향후 수요를 감안하여 적정규모로 확대 ○ ’14. 3. 서울약령시 한방산업진흥센터 건립관련 자문위원회 개최 ○ ’14. 4. 자문위원회 개최 결과 및 투자심사 조건부 추진사항 반영한 건립 방침 수립 * 당초대비 면적 170㎡ 축소 ○ ’14. 6. 설계공모 공고 ○ ’14. 7. 설계공모 당선작 선정 및 계약체결