서울특별시고시 제2014-   호

강남순환도시고속도로 민간투자사업 실시계획 변경 승인

서울특별시 고시 제2007-40호(2007.2.15.)로 고시된 강남순환도시고속도로 민간투자사업의 실시계획을 사회기반시설에 대한 민간투자법 제15조 규정에 따라 다음과 같이 변경 승인하고, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조, 제32조 및 제88조, 토지이용규제 기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정의 의거 도시관리계획 및 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.

2014년  8월   일

서 울 특 별 시 장

1. 사업의 명칭

○ (당 초) 강남순환도시고속도로 민간투자시설사업

○ (변 경) 강남순환도시고속도로 민간투자사업

2. 사업개요

가. 사업의 목적 (변경없음)

○ 서울 남부지역 동·서간 교통소통을 원활히 하고, 구로·금천·관악구 등 서남부 지역에서 강남 등 동부지역과 경부, 외곽순환도시고속도로 및 서해안고속도로와의 접근성을 개선하여 지역 균형발전 촉진

나. 사업개요

○ 위 치 : 서울특별시 금천구 시흥동 ∼ 서울특별시 서초구 우면동 (변경없음)

○ 연 장 : 12.4km (변경없음)

○ 폭 원 : 6차로 (변경없음)

○ 총사업비

- 당 초  7,265억원(민간투자 4,900억원, 건설분담금 2,365억원)

- 변 경  7,736억원(민간투자 5,371억원, 건설분담금 2,365억원)

○ 주요시설 : 영업소 2개소, IC 2개소 (변경없음)

○ 사업면적

- 당 초  51,576.1㎡

- 변 경  53,507.9㎡(증 1,931.8㎡)

○ 공사기간 : 당 초  78개월
변 경  102개월

○ 운영기간 : 운영개시일로부터 30년간 (변경없음)

3. 사업시행자 및 출자자

가. 사업시행자의 주소 및 성명

○ (당 초) 주 소 : 서울특별시 서초구 방배동 1808
성 명 : 강남순환도로주식회사  대표이사 김병윤

○ (변 경) 주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 39(방배동, 원일빌딩 3층)
성 명 : 강남순환도로주식회사  대표이사 조계성

나. 출자자 및 지분율

○ (당 초) 두산산업개발(주) 28.7%, 대림산업(주) 11.5%, 롯데건설(주) 11.5%, 지에스건설(주) 11.5%, 현대건설(주) 11.5%, 현대산업개발(주) 11.5%, 금호산업(주) 5.7%, 동부건설(주) 5.7%, (주)파라다이스글로벌 2.4%

○ (변 경) 한국인프라이호투융자회사 76.5%, 한국산업은행 13.5%, 두산
건설(주) 2.87%, 대림산업(주) 1.15%, 롯데건설(주) 1.15%, 지에스건설(주) 1.15%, 현대건설(주) 1.15%, 현대산업개발(주) 1.15%, 금호산업(주) 0.57%, 동부건설(주) 0.57%, (주)파라다이스글로벌 0.24%

4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 제32조 및 제88조, 「토지이용규제기본법」제8조 규정에 의한 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 사항

가. 결정취지

- 강남순환도시고속도로 개설로 인한 개발제한구역내 환경2등급지(1,800㎡) 훼손에 따른 중앙도시계획위원회 개발제한구역 관리계획 승인조건(대체녹지 확보) 이행을 위한 도시계획시설(녹지-완충녹지) 신설

나. 도시관리계획(녹지) 결정 조서(결정도면 : 별첨도면)

구분	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	녹지	완충녹지	금천구 시흥동 산6-30 일대	-	1,931.8	1,931.8	-

5. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지ㆍ지번ㆍ지목ㆍ면적ㆍ소유권 및 소유권이외의 권리명세, 토지 등의 소유자와 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제2조제5호의 관계인 성명ㆍ주소 : 별항 1

6. 실시계획 변경승인에 관한 서류의 열람장소 및 열람기간

가. 열람 및 문의장소

(1) 서울특별시 도시기반시설본부 토목부(02-3708-8661)

서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동

(2) 강남순환도로주식회사(02-6205-3600)

서울특별시 서초구 효령로 39(방배동, 원일빌딩 3층)

나. 열람기간 : 사업 시행기간내