2015회계연도 사고이월 명세표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연 번	이월사업명	2015 회계연도 예산					지출원인행위액 (2015.12.31 기준)			지출액 (2015.12.31 기준)		2015 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	예산편성별 (당초･추경)
		관･항･세항	목 (세목)	예산현액	배정액	배정 월일	월일	금액	준 공 예정일	월일	금액	관･항･세항	목 (세목)	이월액	준 공 예정일
	합 계			66,547,343	66,234,916			63,146,895			26,987,426			37,294,639 (1,135,170)		2,265,278
1	도심형 아리수 음수대 복합공간 조성 (42201)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (지원사업성시설비) (214-04)	396,000	396,000	’15.4.17	’15.7.27	383,000	’16.3.31	’16.8.12	172,000	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (지원사업성시설비) (214-04)	211,000	’16.3.31	13,000	음수대 조성 장소 확보를 위한 관할 기관(서대문구청등)과의 협의 과정에서 많은 시일이 소요됨에 따라 설치가 지연되어 이월 <사전절차 지연>	당초 (경영관리부)
2	뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 (12103)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	3,200,000	3,127,850	’15.4.8 ~ ’15.10.27	’15.6.19 ~ ’15.12.3	2,735,920	’16.8.31	’15.7.15 ~ ’15.10.19	245,080	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	2,490,840	’16.8.31	464,080	농축조 증설 부지확보를 위한 관련 부서 (서울숲공원관리사무소)와의 협의 과정에서 많은 시일이 소요됨에 따라 공사가 지연되어 이월 <사전절차 지연>	당초 (생산부)
3	국사봉배수지 건설공사 (22102)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	744,477	648,800	’15.3.6 ~ ’15.3.25	’15.5.14	555,600	’16.2.19	’15.8.12 ~ ’15.12.24	78,200	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	575,400 (98,000)	’16.2.19	90,877	건설기술심의위원회 및 도시공원심의위원회 심의 결과 반영 등으로 준공기한이 연기됨에 따라 이월 <사전절차 지연>	당초 (급수부)
4	사당배수지 건설공사 (22103)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	437,600	335,000	’15.3.6 ~ ’15.3.25	’15.4.9 ~ ’15.9.3	290,785	’16.3.31	’15.9.7	27,588	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	263,197	’16.3.31	146,815	설계경제성 심사 결과 반영, 도시공원위원회 심의 절차 이행 등으로 준공기한이 연기됨에 따라 이월 <사전절차 지연>	당초 (급수부)
5	물수요관리 종합계획 (33204)	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	325,000	283,000	’15.3.6	’15.3.19	273,850	’16.3.31	-	-	상수도사업비용 영업비용 일반관리비 (714-01)	일반운영비 (사무관리비) (201-01)	273,850	’16.3.31	51,150	물수요관리 종합계획에 대한 환경부 승인에 많은 시일이 소요되어 이월 <사전절차 지연>	당초 (급수부)
6	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 (11105)	자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	49,736,000	49,736,000	’15.1.2	’15.1.13	49,736,000	’16.6.30	’15.2.13 ~ ’15.12.29	23,917,960	자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	25,818,040	’16.6.30	0	작업공정 지연(지체상금 부과 예정)에 따른 공사기간 연장으로 이월 <공사 중 장애요인 발생>	당초 (시설안전부)
7	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업 관리용역 (11105)	자본적지출 비가동설비자산취득 건설중인자산 (261-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	1,039,000	1,039,000	’15.1.2	’15.1.13	1,039,000	’16.4.14	’15.1.30 ~ ’15.12.29	915,588	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (감리비) (401-02)	123,412	’16.4.14	0
8	남산배수지 1,3지 내부 방식공사 (22202)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	1,688,500	1,688,500	’15.1.22	’15.11.6 ~ ’15.11.24	1,377,757	’16.4.7	’15.12.28 ~ ’15.12.29	407,899	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	1,006,088 (36,230)	’16.4.7	274,513	『상수도 시설물 유지관리방안 수립 보완 용역』 결과를 배수지 내부 방수방식 공사에 반영하고자 발주를 연기함에 따라 이월 <사전절차 지연>	당초 (중부수도)
9	월곡소배수지 1,2지 내부 방식공사 (22202)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	1,000,000	1,000,000	’15.1.22	’15.12.18 ~ ’15.12.24	639,007	’16.5.15	-	-	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	699,256 (60,249)	’16.5.15	300,744	『상수도 시설물 유지관리방안 수립 보완 용역』 결과를 배수지 내부 방수방식 공사에 반영하고자 발주를 연기함에 따라 이월 <사전절차 지연>	당초 (중부수도)
10	가좌배수지 외 1개소 내부 방식공사 (22202)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	1,121,000	1,121,000	’15.1.22	’15.10.28 ~ ’15.12.18	910,756	’16.4.30	-	-	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	910,756	’16.4.30	210,244	『상수도 시설물 유지관리방안 수립 보완 용역』 결과를 배수지 내부 방수방식 공사에 반영하고자 발주를 연기함에 따라 이월 <사전절차 지연>	당초 (서부수도)
11	마포구청역~성산2교간 송배수관 정비공사 (21102)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,056,000	1,056,000	’15.1.2 ~ ’15.8.31	’15.6.22 ~ ’15.12.1	796,214	’16.8.27	’15.9.24 ~ ’15.10.19	31,687	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	908,140 (143,613)	’16.8.27	116,173	비굴착 갱생 공법에 대한 신기술 심의 절차 등 사전절차 이행에 따른 이월 <사전절차 지연>	당초 (서부수도)
12	대현산배수지(1-3지) 내부 방식공사 (22202)	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	1,000,000	1,000,000	’15.1.22	’15.12.23	661,649	’16.5.6	-	-	상수도사업비용 영업비용 배급수비 (713-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	900,253 (238,604)	’16.5.6	99,747	『상수도 시설물 유지관리방안 수립 보완 용역』 결과를 배수지 내부 방수방식 공사에 반영하고자 발주를 연기함에 따라 이월 <사전절차 지연>	당초 (동부수도)
		자본적지출 유형자산취득 기계장치 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	65,000	65,000	’15.10.8	’15.12.23	56,387	’16.5.6	-	-	자본적지출 유형자산취득 기계장치 (235-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	56,387	’16.5.6	8,613
13	상봉역~면목역간 송배수관 정비공사 (21102)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	889,000	889,000	’15.1.2 ~ ’15.8.12	’15.8.6 ~ ’15.12.18	566,244	’16.5.22	’15.10.8 ~ ’15.12.23	371,955	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	452,559 (258,270)	’16.5.22	64,486	관급자재 구매 유찰 및 겨울철 굴착통제로 인한 준공기한 연기로 이월 <사전절차 지연>	당초 (동부수도)
14	노원구 관내 미급수지역 급수공사 및 증압장 설치공사(21111)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	300,000	300,000	’15.11.6	’15.12.4 ~ ’15.12.18	232,587	’16.6.30	’15.12.8	715	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	269,135 (37,263)	’16.6.30	30,150	미급수 지역 급수공사 구간 내 사유지 토지 사용승낙 및 관할 구청(노원구청 녹지과) 업무 협의 지연으로 이월 <사전절차 지연>	당초 (북부수도)
15	남서울아파트 앞~ 강남성심병원 간 송배수관 정비공사 (21102)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,212,000	1,212,000	’15.1.2	’15.3.27 ~ ’15.12.3	899,721	’16.8.25	’15.11.5	7,339	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,078,688 (186,306)	’16.8.25	125,973	비굴착 갱생 공법에 대한 신기술 심의 절차 등 사전절차 이행에 따른 이월 <사전절차 지연>	당초 (남부수도)
16	당산동3가 393-2 ~당산동1가 309 간 송배수관 정비공사 (21102)	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	1,110,000	1,110,000	’15.1.2 ~ ’15.9.3	’15.3.27 ~ ’15.12.30	971,869	’16.4.30	’15.6.22 ~ ’15.12.30	703,215	자본적지출 유형자산취득 구축물 (234-01)	시설비 및 부대비 (시설비) (401-01)	285,289 (16,635)	’16.4.30	121,496	교통소통대책 심의 지연 및 겨울철 굴착통제로 인한 준공기한 연기로 이월 <사전절차 지연>	당초 (남부수도)
17	광암정수센터 정수지 내부 방수방식공사 (12202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	1,000,000	1,000,000	’15.9.10	’15.11.12 ~ ’15.12.21	817,023	’16.6.30	-	-	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	877,023 (60,000)	’16.6.30	122,977	『상수도 시설물 유지관리방안 수립 보완 용역』 결과를 정수지 내부 방수방식 공사에 반영하고자 발주를 연기함에 따라 이월 <사전절차 지연>	당초 (광암정수)
18	뚝도아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단용역 (12202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	150,000	150,000	’15.1.2	’15.6.2	125,760	’16.3.31	’15.12.15	108,200	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	17,560	’16.3.31	24,240	담수구조물 안전진단을 위해 정수지 내부를 비워야 하나, 유출밸브 고장으로 진단이 불가함에 따라 유출밸브를 우선 교체하고자 용역기한을 연장함에 따라 이월 <유관사업 지연>	당초 (뚝도정수)
19	제1정수지 유출밸브 및 부속자재 구매 (12202)	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	77,766	77,766	’15.9.10	’15.12.17	77,766	’16.2.14	-	-	상수도사업비용 영업비용 정수비 (712-01)	수선유지교체비 (기타교체비) (214-05)	77,766	’16.2.14	0	정수지 유출밸브 고장으로 시설물 관리에 어려움이 있어 유출밸브 및 부속자재를 연도말(12월)에 긴급하게 발주함에 따라 납품기한 부족으로 이월 <기타>	당초 (뚝도정수)

(단위 : 천원)