문서번호	세무과-28818
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		세외수입팀장	세무과장
협조	주무관
	주무관

2015년도 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수

최종 준공 검사 결과 보고

2015. 12.

재 무 국

(세무과)

2015년 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수

최종 준공 검사 결과 보고

2015년도 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 용역 사업과 관련하여 3차 준공실적 및 최종 준공 검사를 실시하고 결과 보고함.

※ 근거 : 검사원지정요구(재무과-64090, 2015.12.18)

Ⅰ				사업개요

❍ 사 업 명 : 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 용역

❍ 사업기간 : 2015. 3. 1. ~ 2015. 12. 31 (10개월)

❍ 계 약 자 : 사이텍스정보기술(주)

❍ 계약금액 : 501,300,000원 (부가가치세 포함)

❍ 과업내용

- 세외수입종합징수시스템 프로그램 추가개발 및 기능개선

- 세외수입종합징수시스템 응용SW 운영 및 유지보수

- 세외수입종합징수시스템 상용SW 유지보수

Ⅱ				최종 준공 내역

❍ 대상기간 : 2015. 9. 1 ~ 12. 31 (4개월)

(단위:천원)

구분		계약금액	부분 준공 (1차,3.1 ~ 5.31)	부분 준공 (2차, 6.1 ~ 8.31)	최종 준공 (3차, 9.1~12.31)	비고
준공일자			´15. 6. 19	´15. 9. 14	‘15.12.21
준공 금액	계	501,300	147,654	143,524	210,122
	추가(기능)개발	71,624	18,752	14,622	38,250	92.6FP
	운영 및 유지보수	367,676	110,302	110,302	147,072
	상용SW 유지보수	62,000	18,600	18,600	24,800

Ⅲ				검사(수) 개요

❍ 검사(수) 기간 : 2015.  12.  18  ~ 12. 21 (3일간)

❍ 검수자

- 근거 : 서울특별시 재무회계규칙 제111조에 의거

주관과 담당 사무관, 주관담당자 6급 이하 1명 지정

※ 용역 2억원 이상에 해당

- 현장감독공무원 : 전산 6급 조수정 주무관

- 준공 검사자

•3차 준공실적 검사 : 세외수입팀장, 전산7급 남일진 주무관

•최종 준공 검사    : 세외수입팀장, 전산7급 정남희 주무관

❍ 검사(수) 방법 : 현장감독공무원이 1차 확인후 준공검사자가 최종 복수 검사

❍ 검사(수) 내용

1) 3차 준공 실적 검사

- 과업 이행 실적 검사

검사분야	주요검사내용	비고
추가개발 및 기능개선	개발 성과물 및 산출물 검토	기능점수(FP) 산정 (실적/계획)
응용SW 운영 및 유지보수	- 추진 실적 검토 · 사용자 문의 응대 및 프로그램 보완 · 시스템 운영 모니터링 (일일) · 성능최적화 컨설팅 권고 사항 이행 · 기타 과업 이행 사항
상용SW 유지보수	- SW별 제조사 정기점검 이행여부

‣ 검사 기준 : 과업지시서, 사업수행계획서, WBS, 산출물적용목록표

-  사업관리 분야 검사

• 월별 인력투입 실적

• 사업 공정 단계에 따른 프로젝트관리산출물 작성 여부 검사

2) 최종 준공 검사

- 과업지시서 요구사항 이행 여부 검사

Ⅳ				검사 결과

1) 3차 준공실적 검사 : 적정

❍ 과업이행 실적 검사

① 추가개발 및 기능 개선 분야 : 완료

과제명	개발 완료일 (운영개시일)	기능점수 (계획/실적)	산출물
전용계좌 납부결과 실시간 조회기능 개발	2015.9.24	22.2FP/22.5FP	19종
주민망 조회방법 개선	2015.10.30	13.3FP/13.3FP	16종
국가주소정보시스템 연계	2015.12.1	20.8FP/20.8FP	19종
체납자 재산조회 온라인화	2015.12.20	36.3FP/36.3FP	19종

② 응용SW 운영 및 유지보수 분야 : 완료

- 사용자 요구사항에 의한 프로그램 개선 및 응대 (HelpDesk 운영 실적)

구분	총계	9월	10월	11월	12월 (12/1~12/15)
단순응대	1,416건	370건	493건	367건	186건
프로그램 개선	46건	14건	13건	8건	11건

• 일일모니터링 및 점검 수행

• 성능최적화 컨설팅 권고사항 이행 : 총13개 분야 완료 (금회 5개 분야)

‣ 이행완료후 결과보고 및 보고서 작성 제출

- DB암호화를 위한 기술 검토 및 지원

• 암호화 관련 기술 지원 : 프로그램 암호화 모듈 적용후 검증 활동

• 암호화 후 성능테스트를 위한 기술 지원

• DB암호화 이행 작업 지원

③ 상용 SW 및 유지보수 분야 : 완료

- 월 정기점검 SW(5종) 4회, 분기점검 SW(1종) 1회

【별첨】 세부 추진실적서 검사서(2015.9월~12월)

❍ 사업관리 분야 검사 : 적정

① 투입인력 검사 결과 : 적정

구분	9월	10월	11월	12월	비고
계획	6.0	6.0	6.0	5.0	단위 : M/M
실적	6.0	6.0	6.0	5.0

※DB암호화사업 추진을 위한 인력(특급 1M/M) 투입 : 2015. 7월 ~ 11월 (5M)

② 사업 공정 단계에 따른 산출물 작성 여부 검사 결과 : 적정

프로세스명	산출물명	작성여부	실 적
사업수행계획	WBS	완료
보고관리	주간업무보고서	완료	매주 1회 : 16회
	월간업무보고서	완료	매월 1회 : 총 4회
	완료보고서	완료	1건
리스크관리	이슈관리대장	완료	2건
	이슈내역서	완료	2건
품질관리	품질검토결과서	완료	품질관리활동(최종) 2015.12.1실시
범위관리	요구사항추적매트릭스	완료
회의관리	회의록	완료	총4회
변화관리	변경관리대장	완료	2건
	변경 요청/승인서	완료	2건

※ 산출물 정보화사업관리시스템 등록 : 관리대상 산출물> 프로젝트관리산출물

2) 최종 준공 검사 : 적정

❍ 과업지시서 48개 요구사항 : 완료

❍ 기술협상서  4개 요구사항 : 완료

Ⅴ				별 첨

1. 최종 준공 추진 실적 및 검사(수)조서 1부.

2. 요구사항별 이행실적 검사서 1부.   끝.