2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(광진구)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	중곡동253번지 외 4개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 09	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	80	875	DCIP	150	875	875	645	230	722,550	296,720	177,340	248,490	광진구 중곡동 지역의 상수도관 노후로 인한 녹물출수 및 누수다발 상수도관을 교체하여 반복되는 민원을 해결하고 맑고 깨끗한 수돗물 공급관로 구축을 위한 사업	2.5~4.0 kg/㎠ 880세대 450수전
			중곡동253-9~ 253-31	DCIP 1985	80	136	DCIP	150	136	136	95	41
			중곡동254-1~ 254-60	DCIP 1985	80	127	DCIP	150	127	127	90	37
			중곡동67-1~ 70-1	DCIP 1986	80	240	DCIP	150	240	240	170	70
			중곡동39-1~ 39-62	DCIP 1985	80	72	DCIP	150	72	72	50	22
			중곡동150-153~39-1	DCIP 1985	80	300	DCIP	150	300	300	240	60

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(광진구)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	자양동796번지 외 2개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 09	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	80 ~ 150	975	DCIP	150	975	975	720	255	803,550	329,150	197,600	276,800	광진구 자양동, 능동 지역의 상수도관 노후로 인한 녹물출수 및 누수다발 상수도관을 교체하여 반복되는 민원을 해결하고 맑고 깨끗한 수돗물 공급관로 구축을 위한 사업	3.5~4.5 kg/㎠ 980세대 550수전
			자양동796~ 808-6	CIP 1981 (1991)	150	270	DCIP	150	270	270	200	70
			자양동223-1~ 230-1	DCIP,CIP 1985,1981	80	200	DCIP	150	200	200	150	50
			능동236-10~ 247-7	DCIP 1985	80	505	DCIP	150	505	505	370	135

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(급수운영과)-연간단가

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
3	광진구 상수도공사	2015. 03 ~ 12	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 200	250	DCIP	150 ~ 200	276	250	188	62	223,400	89,500	55,910	77,990	광진구 군자동, 중곡동 지역의 상수도관 노후로 인한 녹물출수 및 누수다발 상수도관을 교체하여 맑고 깨끗한 물 공급 관로 구축을 위한 사업	3.0~4.0 kg/㎠ 500세대 300수전
			군자동503~ 362-3	CIP 1980 (1987)	200	80	DCIP	200	80	80	60	20
			중곡동104-5~ 104-45	CIP 1981	100	70	DCIP	200	70	70	53	17
			자양동229-67~ 612-15	CIP 1981 (1991)	150	100	DCIP	150	124	100	75	25

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	용답동266번지 외 1개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 10	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150	1,800	DCIP	150	1,800	1,800	1,260	540	1,400,000	540,000	360,000	500,000	성동구 용답동 (면목58소블록) 지역 및 송정동(아차산50소블록)지역의 상수도관 노후로 인한 녹물출수 및 누수다발 상수도관을 교체하여 맑고 깨끗한 물 공급 관로 구축을 위한 사업	4.5~5.0 kg/㎠ 4,755가구 2,763수전
			용답동 226-7 ~ 236-10	CIP 80(88)	150	1400	DCIP	150	1400	1400	980	420
			송정동 66-246 ~ 73-488	CIP 83(93)	150	400	DCIP	150	400	400	280	120

동부수도사업소(성동구)

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(성동구)-연간단가

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	하왕십리동974번지 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 10	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	200	800	DCIP	300	400	800	560	240	349,500	150,000	99,500	100,000	성동구 하왕십리동 (대현산66소블록) 지역의 노후로 인한 녹물출수 및 누수다발인 이열배관 상수도관을 정비하여 맑고 깨끗한 물 공급 관로 구축을 위한 사업	4.0~4.5 kg/㎠ 1200가구 40수전 (아파트 밀집지역)
			하왕십리동 974-7 ~ 1062	CIP 80	200 200	400 400	DCIP	300	400	800	560	240

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	장안동 369번지 외 1개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	200 ~ 300	1,850	DCIP	200 ~ 300	1,850	1,850	1,490	360	1,650,000	580,000	220,000	850,000	누수발생 및 적수출수	3.5㎏/㎠ 3,000세대 2,700수전
			장안동 369-1~430-2	CIP 80(91)	300	980	DCIP	300	980	970	780	200
			장안동 387-2~395-3	CIP 80(90)	200~ 300	870	DCIP	200~ 300	870	870	710	160

동부수도사업소(동대문구)

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	용두동 39번지외 3개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 10	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 300	1,610	DCIP	150 ~ 300	1,610	1,610	1,300	310	1,250,000	400,000	200,000	650,000	누수발생 및 적수출수	3.5㎏/㎠ 3,500세대 3,200수전
			용두동 39-186~39-117	CIP 80(92)	200	450	DCIP	200	450	450	360	90
			청량리동 318-4~445-32	CIP 80(90)	300	400	DCIP	300	400	400	320	80
			답십리동 12-3~2-11	CIP 80(92)	200	310	DCIP	200	310	310	250	60
			전농동 206-5~183-5	CIP 80(91)	200	280	DCIP	200	280	280	230	50
			전농동 294-5~90-7	CIP 80(92)	150	170	DCIP	150	170	170	140	30

동부수도사업소(동대문구)

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(동대문구)-연간단가

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비 계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
3	휘경동 276번지외 5개소 상수도공사	2015. 03 ~ 10	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	150 ~ 300	840	DCIP	150 ~ 300	840	840	680	160	598,000	198,000	100,000	300,000	누수발생 및 적수출수	3.5㎏/㎠ 2,500세대 2,200수전
			휘경동 276-1~286-1	CIP 80(92)	300	80	DCIP	300	80	80	70	10
			휘경동 286-1~286-73	CIP 80(92)	300	70	DCIP	300	70	70	60	10
			회기동 286-1~16-58	무라이닝관 1985	200	210	DCIP	200	210	210	170	40
			전농동 60-73~90-11	CIP 84(92)	200	150	DCIP	200	150	150	120	30
			장안동 406-6~399-1	CIP 80(91)	300	210	DCIP	300	210	210	170	40
			답십리동 53-21~53-33	CIP 80(92)	150	120	DCIP	150	120	120	90	30