(구의아리수정수센터 고효율 LED조명 설치공사)

1. 사업 개요

ㅇ 서울시 LED조명 보급기준에 의거 공공부문 LED 조명개선 추진

ㅇ 연차적 사업비 확보 후 시행

ㅇ 사업추진 후 에너지 점검 등 효과분석

2. 사업 추진 대상 및 제품의 품질 수준

ㅇ 대상 : 정수센터 내 고압방전등, 삼파장램프 및 형광램프 490등

ㅇ 품질수준 : 서울시 LED 조명 보급기준에 의함(고효율 인증제품 인증 확인)

3. 사업비 산출 내역(총 소요예산)

품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액 (백만원)	비고
LED조명등기구	70W	개	30	700,000	21
LED램프	30W	개	160	200,000	32
LED램프	21W	개	300	60,000	18
공사비	-	식	1		29
계			490등		100

4. 설치 장소 및 교체 규모

ㅇ 대상 시설별 현재 설치된 교체대상 조명제품 현황, 교체계획 등

설치 장소	교체 전			교체후			절감전력 (MWh/년)	일 사용 시간	비고
	제품 종류	소비 전력	수량 (개)	제품 종류	소비 전력	수량 (개)
정수장내	고압방전등	250W	30	LED	70W	30	17.7	9
	삼파장램프	70W	160	LED	30W	160	21.0	9
	형광램프	32W	300	LED	21W	300	10.8	9
계			490			490	49.5

5. 재원 조달 계획(단위:백만원)                                (단위:백만원)

총사업비	국고보조금	자체조달				비 고
		계	시비	민간	ESCO
100	30	70	70

ㅇ 자체부담금 및 기타 재원조달 방법 상세 기재

계	시 비		민간	ESCO	비 고
	녹색에너지과 예산	자체예산
70		70			2015년 예산반영

6. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전 (A)	개선후 (B)
전기(MWh/년)	93.0	43.4	49.6	23ton/년	53.3	5.0

7. 제품구매 및 설치 계획

ㅇ 구매 계약방법, 제품 성능 확인 및 준공 확인 방안

- 조달구매 및 서울시 LED조명 보급기준에 따라 제품 선정, 고효율인증서 등 확인

ㅇ 사업 추진 일정                                            2015년

사업추진내용	담당	추진 일정 (월)
		3	4	5	6	7	8	9	10
LED 구매 방침서	노성제	0
LED 설계	노성제		0
LED 발주	노성제			0
LED 준공	노성제						0
사업 진도율 (%)		20	40	60	80	90	100

8. 유지보수 및 사후관리 계획

ㅇ 자체 점검반 편성하여 정기적 점검 및 하자기간(3년) 활용

9. ESCO사업 활용방안

10. 전력절감 노력도

11. LED조명 파급효과

ㅇ 연간 49,604kWh 에너지 절감(예산절감 약5,020천원)

ㅇ 긴 수명으로 조명등 유지 보수비 절감

ㅇ 친환경 녹색에너지 산업육성에 기여

12. 사업추진계획의 적정성

- 「서울광원 LED조명 보급 활성화계획」서울부시장 방침 제 77호(14.3.10) - 서울 광원의 LED 교체 기본계획에 의거 년차적 사업추진(3개년계획)

- 「상수도시설물 LED 보급기준 통보」[본부(기전설비과)-515호(2012. 2. 6)]

-  『원전하나줄이기』에너지절감 추진 계획 중 세부시행 계획 [총무과-6637호(2013.5.8)]

13. 사업추진 의지

ㅇ ‘14년 서울광원 LED조명 보급 활성화계획 일환으로 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 건물 내 LED조명 설치 추진