주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R151016	작성자	박철희	작성일	2015/10/16	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	15.3/50.0	5.8/40.0	4.4/10.0	25.5/100.0
		실적	13.7/50.0	5.8/40.0	4.4/10.0	23.9/100.0

주요 내용	1. 기능상세 설계 2. 2015년 항공사진 공간해상도 정보 삭제처리 3. 인트라넷 항공사진 TileMap 2013년도 구축 제작
업무구분	금 주 실 적 (2015.10.12 ~ 2015.10.16)	차 주 계 획 (2015.10.19 ~ 2015.10.23)
사업관리		화면 디자인 설계 및 기능 목록 협의
시스템개발	1. 시스템 설계 - 항공사진 시민서비스 신청서, 검색 디자인 개선 방안 설계 - DB 개념 설계	1. 시스템 설계 - 항공사진 시민서비스 신청서, 검색 디자인 개선 방안 설계 - DB 개념 설계
D B 구 축	1. 인트라넷 서비스 벡터 데이터 좌표변환 - 투영원점 변경에 따른 좌표변환 시계열 주점 외 8개 항목(총:16개 항목) 2. 2015년 항공사진 자료 분석 - 항공사진 공간해상도 정보(GSD:10cm)삭제 - 진북 및 국군기무사 보안지역 확인 - 항공사진 원본 오류 및 진북 오류 (원본오류 : 1매-24코스 30번, 진북오류 : 4매-79코스 37, 38, 39, 40번) 3. 인트라넷 서비스 TileMap 구축 제작 - 2013년도 정사영상지도 제작(TileMap)	1. 인트라넷 서비스 TileMap 구축 제작 - 2009년도 정사영상지도 제작(TileMap) 2. 항공사진 시민서비스 메터 데이터 좌표변환 - 투영원점 변경 정보 Update 3. 2015년 항공사진 DB구축 - 항공사진 공간해상도 정보 삭제 내용 검토 - 항공사진 진북 회전 작업 - 추가 변경 원본항공사진 입수(예정) - 성과내역 작성
이슈사항