주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R151120	작성자	박철희	작성일	2015/11/20	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	26.7/50.0	22.0/40.0	5.3/10.0	54.0/100.0
		실적	24.2/50.0	25.6/40.0	5.3/10.0	45.1/100.0

주요 내용	1. 벡터 데이터 중첩 기능 개발 2. 웹표준 진단 작업(Markup, CSS) 및 수정 3. 항공사진 국군기무사 보안처리 작업
업무구분	금 주 실 적 (2015.11.16 ~ 2015.11.20)	차 주 계 획 (2015.11.23 ~ 2015.11.27)
사업관리	중간보고 자료 작성	중간보고 시행(예정) 일시 : 2015. 11. 23(월요일) 16:00
시스템개발	1. 시스템 구현 - 벡터 데이터 오버레이 (수치지도 인덱스, 행정경계, 지적지번) - Naver 위치검색 기능 개발 - 국가기본구역 API 분석 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 110page 중 1page 누적 : 7page CSS Validation : 총 110page 중 20page 누적 : 50page	1. 시스템 구현 - 메타 데이터 표출 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정
D B 구 축	1. 인트라넷 서비스 TileMap 구축 제작 - 1999년도 정사영상지도 제작(TileMap) 2. 항공사진 시민서비스 벡터 데이터 좌표변환 - GeoServer, PostgresSQL 적용 및 테스트 3. 2015년 항공사진 DB구축 - 국군 기무사 보안처리 (총:921매 중 270매 수행) 누적 : 370 매 - 항공사진 주점 MBR(최소사각형 경계) 데이터 검수	1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국군 기무사 보안처리 작업
이슈사항