주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R151127	작성자	박철희	작성일	2015/11/27	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	28.6/50.0	24.3/40.0	6.4/10.0	59.3/100.0
		실적	25.7/50.0	25.6/40.0	6.4/10.0	57.7/100.0

주요 내용	1. 중간보고회 수행 2. 항공사진 시민서비스 관리자 중복 기능 페이지 분석 및 정리 3. 항공사진 국군기무사 보안처리 작업
업무구분	금 주 실 적 (2015.11.23 ~ 2015.11.27)	차 주 계 획 (2015.11.30 ~ 2015.12.04)
사업관리	중간보고회 수행 일 시 : 2015년 11월 23일(월요일) 16:00~17:00 장 소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층) 참석자 : 공간정보담당(과장, 팀장, 주무관 등 12명) 유관부서(건축기획과 1명) 수행업체(박철희 차장 등 4명)	정사영상지도 국정원 보안 미 처리 영상 서비스 관련 사항 협의
시스템개발	1. 시스템 구현 - 메타 데이터 표출 (수치지도 인덱스, 행정경계, 지적지번) - Naver 위치검색 기능 개발(계속) - 국가기본구역 API 적용 2. 웹표준 진단 - 관리자 중복 페이지 분석 및 정리 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 54page 중 2page 누적 : 9page CSS Validation : 총 54page 중 20page 누적 : 50page	1. 시스템 구현 - 메타 데이터 표출 개발(계속) - 항공사진 낱장 표출 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정
D B 구 축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 국군 기무사 보안처리 (총:921매 중 130매 수행) 누적 : 500 매	1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국군 기무사 보안처리 작업
이슈사항