주간 진척보고서				시스템명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선
문서번호	R151204	작성자	박철희	작성일	2015/12/04	버 전	1.0

프로젝트명	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	29.9/50.0	28.3/40.0	6.8/10.0	65.0/100.0
		실적	26.5/50.0	29.3/40.0	6.8/10.0	62.6/100.0

주요 내용	1. 항공사진 메타 데이터 표출 2. 항공사진 시민서비스 웹표준 Markup,css validation 검사 및 수정 3. 항공사진 국군기무사 보안처리 작업
업무구분	금 주 실 적 (2015.11.30 ~ 2015.12.04)	차 주 계 획 (2015.12.07 ~ 2015.12.11)
사업관리	정사영상지도 국정원 보안 미 처리 영상 서비스 관련 사항 협의 -> 정사영상 10cm급 국정원 보안처리 완료된 정사영상지도 서비스
시스템개발	1. 시스템 구현 - 메타 데이터 표출 (수치지도 인덱스, 행정경계, 지적지번) - 국가기본구역 API 적용 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 Markup Validation : 총 54page 중 3page 누적 : 12page CSS Validation : 총 54page 중 4page 누적 : 54page	1. 시스템 구현 - 메타 데이터 표출 개발(계속) - 항공사진 낱장 표출 개발 2. 웹표준 진단 - 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정
D B 구 축	1. 2015년 항공사진 DB구축 - 국군 기무사 보안처리 (총:921매 중 117매 수행) 누적 : 617 매	1. 2015년 항공사진 DB구축(계속) - 국군 기무사 보안처리 작업
이슈사항